문서번호	설비부-32170
결재일자	2022. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	11/15
			代장병선
협 조

『로봇과학관 건립 기계설비공사』 관급자재(팬코일유닛) 변경구매 검토보고

『로봇과학관 건립 기계설비공사』

관급자재(팬코일유닛) 변경구매 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『로봇과학관 건립 기계설비공사』

관급자재(팬코일유닛) 변경구매 검토보고

『로봇과학관 건립 기계설비공사』에 소요되는 관급자재인 팬코일유닛을 아래와 같이 구매하고자 검토보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 로봇과학관 건립 기계설비공사

○ 위    치 : 서울특별시 도봉구 창동 1-25

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308.39㎡

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
기계설비공사	(주)기술환경 외 1개사	총차	2020.06.29.~2023.08.03.	1,970,149,750
		2차	2022.09.19.~2023.02.28.	600,000,000

○ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정 외 1개사

Ⅱ		관련근거

○ 로봇과학관 건립 기계설비공사 팬코일유니트 관급자재 수량변경 및 구매요청

[KDU(대외)제22-308호(2022.11.10.)]

Ⅲ		검토내용

○ 변경 대상 : 팬코일유니트

- 공사현장 여건을 감안하여 팬코일유니트 수량 변경(1대 증)

○ 관급자재 변경 세부내역                              (단위 : 원)

구분	품명	규격	단위	당초	변경	증감	증감금액
팬코일 유니트	2방향 천장카세트형	냉방 3.3/ 난방 6.0kW	대	12	12	-	변경없음
팬코일 유니트	2방향천장 카세트형	냉방3.9/ 난방7.2kW	대	9	9	-	변경없음
	4방향천장 카세트형	냉방4.2/ 난방7.6kW		3	3	-
	4방향천장 카세트형	냉방5.8/ 난방10.0kW		7	7	-
	4방향 천장카세트형	냉방7.4/ 난방12.5kW		31	32	1	633,000
	고정압천장 매입형	냉방7.97/ 난방13.02kW		11	11	-	변경없음
	고정압천장 매입형	냉방13.37/난방21.86kW		21	21	-
팬코일 유니트 (옵션)	고정압형 PCB 기판	FCUR-C5, 마이콤스위치	대	32	32	-
	팬코일유닛(부품)	SFC-2way	SET	94	94	-
	팬코일유닛(부품)	FCUR-S2, 유선리모컨	EA	48	48	-

○ 종합 검토내용                                       (단위 : 원)

품 명	소요예산
	변경 전	변경 후	증·감
팬코일유니트	69,501,890	70,134,890	-633,000

○ 건설사업관리단 검토의견

- 로봇과학관 건립 기계설비공사 중 팬코일유니트 설계도서를 검토한 결과 공사현장 여건을 감안하여 팬코일유니트(FCU-05)의 수량 1대를 증 함이 타당함.

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리단의 관급자재(팬코일유니트) 수량변경 관련 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 계약부서(총무부)에 구매를 요청하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.