문서번호	치수과-24700
결재일자	2022. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
김태규	최연호	11/15
		박상보

- 염창나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토보고

2022. 11.

한강사업본부

(치  수  과)

- 염창나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토보고

『염창나들목 리모델링 공사』관련 서울시설공단 실정보고 사항  (사토장 변경)에 대한 검토 및 처리계획을 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 염창나들목 리모델링 공사

ㅇ 공사기간 : 2021.09.08 ~ 2023.06.30. (1차 : ’21.09.08 ~ ’22.12.31)

ㅇ 공사규모 : 차수벽 철거, 육갑문 및 E/V설치, 나들목 내·외부 환경개선

***************************************

**********************

ㅇ 공사감독대행 : 서울시설공단 공사감독 1처

□ 보고내용 : 사토장 변경

ㅇ 관련근거

- 공사감독1처-6284(2022.11.08.)호『실정보고 검토보고(사토장 변경)』

- 염창 2022-16(2022.11.07.)호 『사토장 선정 보고』

ㅇ 사토장 변경 사유

- 당초 설계시 수도권매립지로 선정되어 있으나, 현장내 토사가 벌개외 콘크리트 폐기물과 혼합된 토사로 반입기준에 적정하지 않아 사토장 변경

- 수도권매립지 반입 불가 및 토석정보공유시스템 6개 현장 조회 결과 적정한 사토장 선정 불가하여 현장 여건에 맞는 사토장을 선정코자 함

ㅇ 토사 반입기준 검토

반입기준	검토결과	비고
식물뿌리가 부피 5%이상 혼합된 토사	부적합
직경 15cm 이상의 암버럭이 혼합된 토사	부적합
악취발생 물질이 포함된 토사	부적합

ㅇ 현장사진

현장사진 1	현장사진 2

ㅇ 사토장 변경 현황

구 분	설계	사토장 변경
위 치	수도권매립지	김포시 하성면 전류리 548
운반조건	덤프 24.0ton	덤프 24.0ton
운반거리	L=26.9㎞	L=27.75㎞
운반속도	경유지에 따른 도로상태 기준 불명확	품셈 기준
왕복시간	64.02min	84.97min
운 반 량	4,510㎥	4,510㎥

ㅇ 공사비 증감액 : 운반비 변경없이 계약단가 적용

구 분	계약(원/㎥)	변경(원/㎥)	비고
사토운반	9,757	9,757	증·감 없음

□ 검토내용

<서울시설공단>

ㅇ 토지주의 토사반입 동의서 및 관련 서류 제출 확인

ㅇ 현장 토사 확인결과 수도권 매립지 관리공사에서 제시하는 토사반입기준에 부합하여 원활한 공사 진행을 위해 사토장을 변경하고 운반단가는 당초 계약단가를 적용하는 것이 타당함

<보고자 의견>

ㅇ 현장 채가름 작업 및 폐기물 선별작업 시행하여 농지법 시행규칙 별표1의 성토 기준에 적합토록 개량하여 토지 소유주 입회하에 사토 처리토록 관리감독 철저 필요

ㅇ 수도권 매립지 반입 불가 확인 및 토석정보공유시스템 조회결과 적정 사토장을 선정하기 어려워 위 보고내용과 같이 사토장 변경 처리함이 타당함

□ 조치계획

ㅇ 상기 검토내용과 같이 실정보고 사항 승인 통보(치수과→서울시설공단)

ㅇ 사토 반출 등 공사 시행 철저 및 추후 설계변경 시 반영

붙임 : 사토장 변경관련 공문 2부.  끝.