문서번호	설비부-32092
결재일자	2022. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
임현철		문학준	11/15
			代장병선
협 조

『신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사』 계약금액 변경 및 공사기간 연장 검토 보고

2022. 11.

도시기반시설본부

【설 비 부】

『신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사』 계약금액 변경 및 공사기간 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사』관련, 계약상대자로부터 계약금액 변경(ESC) 및 공사기간 연장요청이 있어 적정 여부를 검토하여 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 신림공영차고지(저류조포함)건설 전기공사 변경계약 요청

- 제일(발)2022-4301호(2022.11.10.)

○ 물가변동에 따른 계약금액 조정(제2회) 검토 보고

- 설비부 20380호(2022.03.29.)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : **********************

○ 위    치 : ****************

○ 규    모 : ******************************************

○ 공사기간 : *************************

○ 계약금액 : ******************

○ 시 공 사 : ***********

○ 건설사업관리단 : *****************

○ 공사현황

공사건명	차수	공사기간	계약금액(원)	비고
****	**	*************************	***************
	**	*************************	*************
	**	*************************	************	**

Ⅲ		검토내용

○ 물가변동으로 인한 계약금액 변경

구 분	계 약 금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 차	*************	*************	************	***************************** *********
2 차분	**********	**********	*

○ 공사기간 변경

구 분	공사기한 변경		비 고
	당 초	변 경
총 차	*************************	*************************	****
2 차분	*************************	*************************	******

○ 변경사유

- 물가변동으로 인한 계약금액조정(제2회) 승인으로 인한 변경

※ 설비부-20380(2022.03.29) 검토보고

- 선행공종(토목) 지장물이전 지연으로 인한 공정추진 지연으로 공기연장

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부 : 서울시(미부과)

Ⅳ		건설사업관리자 의견

○ 물가변동으로 인한 계약 금액조정(제2회) 승인사항에 대한 변경계약으로

적정하게 반영되었으며,

○ 선행공종(토목)의 지장물 이전 지연에 따른 전기공사 추진의 지연으로 공사

기간 변경은 타당하다 사료됨.

Ⅴ		보고자의견

○ 감리단 의견과 같이 물가변동으로 인한 계약금액과 공사기간을 변경함이

타당하다고 사료되어 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 변경계약 요청 공문(건설사업관리단) 1부.

2. 물가변동에 따른 계약금액 조정(2회) 검토보고.  끝.