문서번호	물재생시설과-28556
결재일자	2022. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장
곽윤석	최년수	11/15
		김윤수

- 스마트 하수처리공정 인프라 구축 감리용역 -

준공기한 연기 보고

2022. 11.

물재생시설과

『스마트 하수처리공정 인프라 구축 감리용역』

준공기한 연기 보고

「스마트 하수처리공정 인프라 구축 감리용역」과 관련하여 본 용역의 과업변경(2차)으로 인한 계약기간이 연장되어 감리용역 준공기한을 연장하고자 함

Ⅰ		관련근거

▢ 「스마트 하수처리공정 인프라 구축」설계변경 시행

- 물재생시설과-28509호(2022.11.14)

▢ 「스마트 하수처리공정 인프라 구축 감리용역」계약변경 승인요청

- MIRAE-22-0698호(2022.11.14)

Ⅱ		용역개요

▢ 용 역 명 : 스마트 하수처리공정 인프라 구축 감리용역

▢ 용 역 사 : **********

▢ 용역기간 : *************************

*************************

▢ 용역내용(3단계 감리)

- 정보시스템 구축 및 운영사항 등을 종합적 점검 및 개선사항 마련

· 보안취약점, 데이터정확성, 과업이행 여부 및 완성도 점검

- 스마트 하수처리공정 인프라 구축 사업에 적합한 시스템 도입 적정여부, 항목별 과업내용 이행 적절여부 점검

Ⅲ		그간 추진현황

▢ ' 21. 8. 5. : 스마트 하수처리공정 인프라 구축 감리용역 착수

▢ ' 21. 8. 9 ~ 8. 13 : 요구정의단계 감리시행

▢ ' 21. 10. 5 ~ 10. 6 : 상시감리검토 시행(자재 제작승인도서)

▢ ' 22. 1. 11 ~ 1. 14 : 상시감리검토 시행(사업진행 및 과업변경 )

▢ ' 22. 4. 11 ~ 4. 15 : 상시감리검토 시행(사업진행 및 설계단계 예비)

▢ ' 22. 5. 2 ~ 5. 6 : 설계단계 감리시행

▢ ' 22. 6. 28 ~ 6. 29 : 상시감리검토 시행(자재 변경제작승인도서)

▢ ' 22. 10. 18 ~ : 종료단계 감리시행

Ⅲ		설계변경내용

▢ 변경내역 : 준공기간 연장

**	**	**	**
****	*****************	***************19
****	********	****

▢ 변경사유

- ******************************************************************

**********************************

Ⅲ		행정사항

▢ 용역기간 연장에 따른 변경계약 의뢰(→재무과)

붙임  1. 관련 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.