문서번호	수변감성도시과-4002
결재일자	2022. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수변활성화팀장	수변감성도시과장	물순환안전국장
김창현	김소연A	박홍봉	11/16
			한유석

도림천 상권 활성화를 위한 수변인프라 조성

기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기보고

2022. 11.

물순환안전국

(수변감성도시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

도림천 상권 활성화를 위한 수변인프라 조성

기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 보고

市 정책사업인 '서울형 수변감성도시 선도사업'의 일환으로 추진 중인「도림천 상권 활성화를 위한 수변인프라 조성 기본 및 실시설계 용역」의   준공기한 연기보고임

Ⅰ		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 도림천 상권 활성화를 위한 수변인프라 조성 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 용역기간 : '22. 6. 27. ~ '22. 11. 23.

***********************************

******************************

ㅇ 과업내용

- (공유형 수변테라스 조성) 수변데크 및 그늘구조물 설치 등

- (도로 및 보도 개선) 도로 선형 및 폭, 성상 변경 등

- (기타 시설물 설치) 조명 및 조경시설 배치 등

Ⅱ		추진경과

ㅇ '22. 5. 11. : 시범사업 추진계획 수립(시장방침)

ㅇ '22. 6. : 기본 및 실시설계 용역 발주 및 착수

ㅇ '22. 9. 14. : 착수보고회 실시

ㅇ '22. 11. 7. : 주민(지역상인회) 면담실시 등

Ⅲ		설계변경 내용

ㅇ 변경사항 : 계약기간 37일 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	'22.6.27.~'22.11.23.	'22.6.27.~'22.12.30.	37일 연장

ㅇ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

ㅇ 지체상금 부과여부 : 해당없음

********

***********************************************************

Ⅳ		향후계획

ㅇ '22. 11.     : 중간보고회 개최

ㅇ '22. 12.     : 도로교통규제심의 및 좋은빛 위원회 등 실시

ㅇ '22. 12. 30. : 용역 준공

Ⅴ		행정사항

ㅇ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰 공문 발송(→재무과)

붙 임 : 준공기한 연기 합의각서 1부.  끝.