문서번호	보행자전거과-4258
결재일자	2022. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자전거도로팀장	보행자전거과장
권영기		이덕배	11/16
			오세우
협조

「천호대로 자전거 간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계용역」

설계변경 시행계획 보고

2022. 11.

도 시 교 통 실

(보행자전거과)

「천호대로 자전거 간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계용역」

설계변경 시행계획 보고

천호대로 자전거도로 군자교 연결교량 설치를 위한 ******************에 따른 설계변경 검토보고 임

□ 추진근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규 제197호,‘22. 1. 7.)

- 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

○ 과업지시서(천호대로 자전거 간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계용역)

- 제1장 4. 주요업무의 사전승인

- 제1장 15. 과업내용 변경

○ **************************

***************************************

□ 용역개요

○ 용역구간 : 청계천~용두공원~천호대교 북단(양방향 13.5㎞)

○ 용역과업

- 천호대로 자전거전용도로 설치(양방향, L=13.5km)

- 군자교 연결램프 2개소

○ 용역기간 : 2022. 5.17. ~ 2023. 5.16.

*************************************

*********************

□ 추진현황

○ ’21.7.12.  : 투자심사

○ ’22.3.23   : 설계용역 발주

○ ’22.5.17   : 용역계약 및 착수

○ ’22.5.31   : 착수보고회

********************************************

*******************************************

□ 협의내용********

○ 관련근거 : ***************************

********************************************

*****************

***********************************************************

****************

*********************************

************************

○ 조치계획

******************************

*********************************************

***********************************

□ 설계변경 주요내용

○ 용역기간 : ’22. 5.17. ~ ‘23. 5.16.(변경없음)

○ 용역금액 : ****************************************

***********************************************

*****************************************************************

○ 도시교통실 보행자전거과, 자전거이용 활성화 및 교통환경개선, 천호대로 자전거전용도로 구축, 시설비************** / ’22년 본 예산)

□ 향후계획

○ ’22. 11.   : 천호대로 자전거전용도로 추가 과업지시

○ ’22. 12.   : 천호대로 자전거전용도로 계약변경

○ ’23.  3.   : **********************

○ ’23.  5.   : 용역 준공

*************************************

******************************************

****************************************