아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'22년 상수도관 세척사업 건설사업관리(감리) 시행기간 연기 협조요청

1. 급수운영과-26558호(2022. 11. 17.) 및 23239호(2022. 7. 21.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인 '대형 상수도관 및 소블록 배수관 세척사업' 의 감리업무에 대한 세척업무 지연에 따라 사업의 원활한 추진을 위해 건설사업관리(감리) 시행기간 및 감리비를 아래와 같이 변경하오니,

3. 귀 부서에서 관리하는 상수도공사 건설사업관리 용역의 추가과업 요청 및 설계변경,예산집행 업무에 협조를 당부드립니다.

○ 시행기간 변경

- 당초기간 : 2022. 8. 20.~2022. 11. 20.(3개월)

- 변경기간 : 2022. 8. 20.~2022. 12. 20.(4개월)

○ 예산변경

- 당초 감리비 : 150,000천원

- 변경 감리비 : 175,000천원

붙임 『'22년 상수도관 세척 사업』관련 건설사업관리(감리) 시행기간 연기 검토 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
수신자	급수설비과장, 누수대응과장, 시설관리과장
주무관	최호림		급수운영과장	11/17
代김민룡
협조자	주무관	박현대		주무관	김민룡
시행	급수운영과-26618	(	2022.11.17	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1466	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)