문서번호	공원운영과-4961
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	11/17
			代박종환
협조

「남산청사 노후 창호 교체공사」

현장 실정 보고서 제출에 따른 검토 보고

2022. 11.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 노후 창호 교체공사」

현장 실정 보고서 제출에 따른 검토 보고

「남산청사 노후 창호 교체공사」와 관련하여 시공사로부터 현장 실정보고서가 제출되어 검토 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 남산청사 노후 창호 교체공사

□ 공사위치 : 중부공원여가센터 남산청사 *************

□ 공사기간 : ************************************)

□ 도 급 액 : *********

□ 도급업체 : *****************

Ⅱ		검토내용 및 결과

① 창호 및 방충망 내·외부 랩핑 설치

ㅇ 현황 및 문제점

- 신규 창호는 PVC 백색으로, 기존 청사 건축물 색상 및 공원 관리 사무소로서 공원과 어울리는 색상으로 미관 개선 필요

ㅇ 검토결과

- *************************************************

② 창호 외부 테두리 마감 작업

ㅇ 현황 및 문제점

- 기존 창호는 210mm(100mm + 110mm) 알루미늄 창호 두 개를 덧붙여놓은 형태로, 신규 창호(170mm) 설치 시 40mm의 공차가 발생하여 개선 필요

기존 창호 설치 상세도	신규 창호 설치 상세도	철거 부위 공차 현황

ㅇ 검토결과

**********************************************************************************

③ 창호 주변 보수 및 손보기 작업

ㅇ 현황 및 문제점

- 기존 외부 창호 초기 시공 (`72년) 시 건축물 콘크리트 내 창호를 파묻은 시공방식으로 작업 현장 여건상 내·외부 손상 발생

창호 철거 현황	화장실 창호 철거 현황	창호 주변 철거 현황

ㅇ 검토결과

- 작업 현장 상 내·외부 손상없이 교체 공사가 불가하여, 일부 공정 추가 필요

**************************************************

**********************************************

**************************************************

④ 창호 보양 작업

ㅇ 현황 및 문제점

- 창호 교체 시 양생 및 유리 사춤까지 업무공간 개구부 개방 형태로 초기 설계 내역에 반영되어야 할 사항이나 누락됨

창호 철거 후 개구부 현황	창호 설치 후 개구부 현황	창호 설치 후 개구부 임시보양

ㅇ 검토결과

- **************************************************************************************

Ⅲ		조치계획

□ 작업 현장 여건상 철거 장비 사용 불가피하여 창호 주변 탈락 현상 발생한 상황으로 신규 공정을 추가하여 공사를 시행하고,

□ 추후 설계 변경(정산)을 시행하고자 함

따로붙임 1.현장실정보고서 1부. 끝.