문서번호	보행자전거과-4354
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	보행자전거정책팀장	보행자전거과장
박성훈	최미숙	11/17
		오세우

잠수교 차 없는 다리 정례운영

교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역 변경계약

2022. 11

도시교통실

(보행자전거과)

잠수교 차 없는 다리 정례운영

교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역 변경계약

잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역과

관련하여 교통통제 취소사유 발생으로 인하여 계약을 변경하고자 함

□ 계약개요

ㅇ 용 역 명 : 잠수교 차 없는 다리 정례운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역

ㅇ 계약기간 : ’22. 9.25 ~ 12.23

ㅇ 용 역 사 : 주식회사 케이제이에스랩(대표자 나봉채)

ㅇ 계약금액 : 금121,124,780원(금일억이천일백일십이만사천칠백팔십원)

□ 변경내용

ㅇ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구분	변경내용		비고(감)
	당초	변경
계약 금액	121,124,780	***********	**********

*************************

*********************************

*********************************

************************************

*******************************

ㅇ 감액 사유

- 당초 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리를 위해 '22.9.25(일)~10.30(일)까지 매주 일요일 총 6회 기준으로 계약을 체결했으나,

- 축제 주관 한강사업본부에서 10.30(일) 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제를  취소함에 따라 교통통제 1회 미실시로 인한 계약 금액 변경 사유가 발생함

ㅇ 귀책 사유 : 서울시

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

ㅇ 변경계약 의뢰(재무과)  : '22.11.18

붙 임 1. 계약변경(감액) 산출내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.