문서번호	도로보수과-29236
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권은용		11/18
		윤옥광
협 조
	주무관		맹우재

2022년 무단횡단금지 시설물 설치사업(소파로)  설치 변경계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022년 무단횡단금시시설 설치사업(소파로)

설치 변경계획 보고

2022년 무단횡단금지시설 설치 구간 중 굽은도로로 설치시 대형차량 운행에 지장이 있을수 있어 설치를 취소하고 관내 노후된 시설물을 교체하여 시민들의 안전사고(교통사고) 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2022년 도로부속시설물 설치사업 무단횡단금지시설 설치계획 보고

○ 도로보수과-22129호(2022.5.19.)

Ⅱ		보고내용

□ 당초 계획 구간인 소파로등 2개 노선에 대해 현장조사 결과, 굽은도로상 중앙에 설치시 대형차량의 운행에 저촉되어 안전사고 등이 우려됨.(붙임 1. 참조)

○ 당초 계획구간(경찰서 요청)

도로명	위 치	연 장 (m)	소요예산 (천원)	비고
소파로	교육연구정보원~한양공원입구	117	28,551	철제가드레일 및 단부
	한영공원~남산케이블 주차장	105	21,967
계		222	50,518

□ 관내 도로시설물 노후구간 교체 건으로 변경

Ⅲ		조치의견

□ 당초 계획구간에 설치시 대형차량(버스, 트럭등)과 시설물 간섭으로 안전사고가 우려되어 이를 취소하고,

□ 한강대로(서울역 및 한강대교 북단) 구간 노후시설 교체로 변경 설치코자 함.

○ 변경구간

도 로 명 (위 치)		노후시설물 교체연장 (경간)	소요예산 (천원)	비고
당 초	변 경(한강대로)
소파로 (교육연구정보원~한양공원입구 및 한양공원~남산케이블 주차장)	서울역 인근 (한강대로 403-2)	56	39,618
	한강대교 북단, LG유플러스정류장 인근	130

Ⅳ		설치계획

□ 현 통일로(영천시장인근) 노후 시설 교체와 관련 특정제품선정 심사위원회 심의결과(도로보수과-28182(22.10.21)) 선정된 조달업체에 연말 원활한 사업진행(조달업체 선정 및 연말 업체사업 지연 등)을 위해 추가하여 구매 설치하고자 함

Ⅵ		향후계획

□ 22.11월 말 : 관급자재 추가구매

□ 21.12월 중순 : 사업완료(준공)

붙임 : 1. 현 소파로 현황사진 1부.

2. 노후 교체구간 위치도 및 현황사진 1부.  끝.