문서번호	설비부-32386
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		문학준	11/18
			김중영
협조

제2자유로 입체화 기계설비공사 기성검사(1회) 결과보고

『제2자유로 입체화 기계설비공사』

기성검사(1회) 결과보고

2022.  11.

도시기반시설본부

(설비부)

『제2자유로 입체화 기계설비공사』

기성검사(1회) 결과보고

우리 본부에서 추진중인「제2자유로 입체화 기계설비공사」와 관련하여, 건설사업관리단으로부터 기성검사(1회) 결과가 접수되어 검토 보고함.

Ⅰ		공사개요 및 근거

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 제2자유로 입체화 기계설비공사 (월드컵경기장 교차로 일대)

ㅇ 공사기간 : 2021.10.06. ~ 2022.12.30.

ㅇ 도 급 비 : *************

ㅇ 시 공 사 : **********

ㅇ 감 리 단 : ********************

□ 기성검사 관련근거

ㅇ 지방계약법 제17조, 동법 시행령 제64조, 공사계약 일반조건 제27조

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제10, 102, 103조

Ⅱ		기성검사 결과

□ 검사 개요

ㅇ 검 사 일 : 2022.11.16.(수)

ㅇ 검 사 자 : 책임건설사업관리기술인, 기술지원건설사업관리기술인

ㅇ 입 회 자 : 담당 주무관, 현장대리인

□ 기성검사 요청금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액	전회기성	금회기성	누계금액	잔액
도급액	***********	*	***********	***********	*********

□ 건설사업관리단 기성검사 결과

ㅇ 공사 기성부분(1회) 검사관련 현장시공 확인 결과 내역 및 도면과 같이 동일하게 시공되었음을 확인함.

ㅇ 확인항목

- 지하차도 소화기함 및 집수정 모노레일 호이스트 설비

- 수중펌프 설비, 배수배관 설비, 환기설비, 통로 소화기 비치 등

□ 공사관리관 입회결과

ㅇ 기성검사자가 계약서, 시방서, 설계내역 및 도면 등에 따라 현장시공 여부를 확인하여 검사를 실시하였으며, 기성내역 및 과정에 이상없음을 확인함.

Ⅲ		행정사항

ㅇ 건설사업관리단에서 실시한 기성검사 결과가 적합한 것으로 확인되어, 기성검사 결과를 계약부서(총무부)에 통보 조치하고자 함.

붙임 : 기성검사 결과보고 1부.  끝.