문서번호	친환경건물과-3960
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	11/18
			서은경
협조
	주무관		장천섭

북부·중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 변경계획

2022. 11.

기후환경본부

(친환경건물과)

북부·중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 변경계획

「북부·중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역」과 관련하여 내진성능평가 및 설계반영을 위한 과업기간이 부족하여 용역기간내 용역을 완료하기가 어려우므로 원할한 설계진행을 위해 용역기간을 연장하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

구분	설계용역명		비고
	북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링	중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링
대상건물(규모)	본관(1,991㎡)	나눔관(1,468㎡)
위치	노원구 덕릉로70가길 81	용산구 한남대로 136
***	*************	*************
****	***********	***********
****	****************	****************

Ⅱ		추 진 경 과

○ '21. 10. 28  : 「'22년 공공건물 ZEB 전환 사업계획」(기후변화대응과-14417호)

○ '21. 3 ~ 4월 : 기술용역 타당성 심사

○ '22. 4. 11     : 시 소유 건물 ZEB 전환 리모델링 설계용역 시행계획

○ '22. 4. 27    : 설계용역 계약 및 착수

○ '22. 7. 1     : 내진설계 반영 협조요청(일자리정책과 → 기후변화대응과)

○ '22. 7. 28    : 설계용역 변경계획 (기후변화대응과-25932호)

○ '22. 8. 4     : 설계용역 변경계약

Ⅲ		용역사 용역변경 요청

**********************************

*************

**********************************************************************

****************************************************************************************

************************************************************************************************************

Ⅳ		검 토 결 과

*******************

**********

************************************************************************************

*************************

*******************************************

Ⅴ		계 약 변 경

○ 근거 : 지방자치단체 용역계약 일반조건 Ⅵ(과업내용의 변경 및 계약금액의 조정)

○ 변경내용 : 용역기간 연장

******************************************

○ 계약변경(용역비 및 용역기간)                                             (단위 : 원)

용역대상	구 분	당 초	변 경	증 감
******* ****	***	**********	****	*
	****	**************	*****************	******
******* *****	***	**********	****	*
	****	**************	*****************	******

※ 내진보강 설계비는 향후 실시설계시 산출된 공사비에 따라 추가반영 검토필요

Ⅵ		행정사항

○ '22. 11월 : ZEB 전환 리모델링 설계용역 계약변경 의뢰

○ '23.  3월 : ZEB 전환 리모델링 설계용역 준공

붙임  용역사 변경계약 요청 공문 1부.  끝.