아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장 실정보고서 검토결과 통보 (2022년 관악구 소블록 배급수관망 개선공사)-1구간, 2구간

1. 귀 공단에서 감독 시행중인 「2022년 관악구 소블록 배급수관망 개선공사」현장 실정에 대해 검토하여 아래와 같이 통보하오니 공사 감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현장 실정 내용 및 검토결과

구간	구분	공사현장 실정 내용	우리사업소 검토의견
1구간	분기부 시공방법 변경	- 지장물(도시가스 배관)로 인하여 수평으로 천공이 불가하여 원형밸브실 설치 및 기계굴착이 어려운 실정임.	- 적정성 여부 검토 : 적정 • 수평시공 불가로 인한 밸브사장은 불가피한 상황이며, • 통신관로 및 가스관으로 인하여 인력비율 조정이 적정함.
	골재포설 및 발생토 잔토처리	- 시점부 급경사로 인하여 토사 되메우기 시 차량밀림 등 시민 불편사항이 발생되어 골재포설 및 발생토 잔토처리가 필요한 실정임.	- 적정성 여부 검토 : 적정 • 경사부 차량밀림 등 통행위험 및 인근 고등학교 소음 및 통행불편 최소화를 위하여 적정함.
2구간	공시시간 변경 (주간 ⇒ 야간)	- 현장 합동조사 결과 편도2차선 및 주간 차량통행량이 매우 많고, - 주간 공사시행 시 보행시민 및 시내버스 이용객 불편으로 인한 민원발생 우려가 있음.	- 적정성 여부 검토 : 적정 • 당초 설계 당시보다 신림3구역 건축공사 및 신림2구역 철거공사로 인한 공사차량 통행이 증가되었으며, • 주간작업 시 교통혼잡 및 초등학교 등⦁하교 불편사항이 우려되어 관할구청과 야간작압으로 협의된 사항이므로 적정함.

끝.

	남부수도사업소장
주무관	서동민		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	11/21
代서규석
협조자
시행	급수운영과-34904	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(5)