아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2022년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사)

우리센터에서 시행중인 『2022년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 공사』에 대하여 설계변경 심의위원회 개최결과에 의거 아래와 같이 설계변경를 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2022년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사

2. 도 급 자 : (주)합동종합건설 대표 박종우

3. 계약기간 : 2022. 3. 23. ~ 11. 30.

4. 계약금액                                                             (단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감
도 급 비	70,540,500	73,808,000	증) 3,267,500

5. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수비및취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

6. 설계변경 금액 변경 사유 : 계약물량 증.감 및 제경비 감소 사항 발생

붙임 : 1. 설계변경 심의 의결서 1부

2. 제경비검증확인서(기술심사담당관) 1부

3. 설계변경내역서 1부

4. 합의서 및 보험료완납 증명원 1부

5. 설계변경 시행보고서 1부.  끝.

주무관	김종필		원수관리과장	노지문		강북아리수정수센터소장	11/21
어용선
협조자	주무관	황여진		주무관	류혜영
시행	원수관리과-21812	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5233	/전송	02)3146-2238	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개(5)