문서번호	수상시설과-1442
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수상시설과장	수상사업부장
박강수		권혁제	11/21
			代김영호
협조

- 한강공원~당인리 발전소 승강기 설치공사 -

공사여건 변경(6차)에 따른 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

한 강 사 업 본 부

(수상시설과)

- 한강공원~당인리 발전소 승강기 설치공사 -

공사여건(6차) 변경에 따른 검토보고

당인리 발전소 승강기 주변 경관조성 공사에 따른 신규공종 및 물량변경 실정보고 사항에 대하여 검토하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명 : 한강공원~당인리 발전소 승강기 설치공사

ㅇ 공사위치 : 한강공원~당인리발전소(마포구 당인동 312 일대)

ㅇ 공사기간 : `'21. 12. 14. ~ `'22. 12. 15.

ㅇ 공 사 비 : ***********************************

ㅇ 시 공 사 : 태궁종합건설 주식회사  대표  최 태 복

ㅇ 감독대행 : 서울시설관리공단(공사감독1처)

Ⅱ		검 토 및 보 고 내 용

가. 검토근거 : 서울시설공단 공사감독1처-56587호(＇22.11.18.)

나. 검토 및 보고내용

ㅇ 승강기 앞 기존 경사면 토사유출 방지 및 사면보호를 위하여 조경석 및 식생매트 설치

****************************************************************************

ㅇ 관련부서 실무협의에 따른 조경수 수종변경 및 주변 예초작업 시행

*********************************************************************************

******************************

*****************************************

ㅇ 경관개선을 위한 관목수량 증가와 임목폐기물 처리

*********************************

**************************************************

************************************************************

****************************************

다. 변경수량 집계표

(단위 : 천 원)

공 종	규 격	단위	수 량		변경 수량	공 사 비
			당초	변경
******	***********	*	*	***	*******	*********
********	***********	*	*	***	*******	*********
*********	************	*	**	*	*******	*********
***	******	*	*	**	*******	*********
****	**	*	*	*****	********	*********
****	***********	*	*****	*****	*******	*********
****	****	*	***	***	*******	*********
*********	****************	*	**	**	*******	*********
*****		*	*	****	*******	********
******						*********

Ⅲ		조 치 계 획

ㅇ 서울시설공단의 사면부 조경석 쌓기와 추가 관목식재 등에 대한 실정보고

사항은 현장여건상 적절한 것으로 검토 되었으므로 변경승인하고자 하며

ㅇ *************************************************************

붙임  1. 서울시설공단 실정보고서 1부.

2. 시공사 실정보고서

3. 수량산출서.  끝.