아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장(철도사업처, 신호처)
(경유)
제목	신호 연동검사(모란차량기지) 일정변경 알림[별내선(8호선연장) 신호시스템 제작구매설치]

1. 도시철도설비부-27357호(2022.10.31.), 별내선시감 제22-983호(2022.11.21.)와 관련됩니다.

2. 당초 계획된 일정에서 변경 사항이 있어 붙임 내용과 같이 추가 검사를 시행하고자 하니 협조하여 주시기바랍니다.

가. 사 업 명:“별내선(8호선 연장) 신호시스템(본선 및 차량기지) 제작구매설치”

나. 시험장소: 모란차량기지

다. 시험내용: 신호 연동검사(시험선 및 PDT 시험 포함)

라. 시험기간: 2022.11.7.(월) ~ 11.25.(금)

마. 변경 세부사항: “신호 연동검사 일정변경 시행계획”참조

아. 일정조정 사유: 연동검사 기간내 미시행 개소 추가검사 및 PDT 시험

붙  임:  신호 연동검사(모란차량기지) 일정변경 보고 [별내선(8호선연장) 신호시스템 제작구매설치] 1부.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	서영석		신호과장	조준규		도시철도설비부장	11/21
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-28149	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7327	/전송	02-772-7308	/	youngsuk1128@seoul.go.kr	/	부분공개(5)