젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사[설계변경(2회) 시행]

우리 구에서 시행중인 『2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)」에 대하여 다음과 같이 설계변경(2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2022. 3. 22. ~ 2022. 12. 10.

3. 계약상대자 : ㈜신우네이처 대표 김동진

4. 설계변경사유

- 여름철 잦은 강우로 주요도로 위주 정비 실시로 미정비지역 발생 및 가을철 낙엽 등 퇴적물 정비를 위한 재난관리기금(시비) 신청결과 수정가결 완료

- 정비예산 추가 확보에 따른 공사비 증액 및 단순물량 증가

· 주요 변경사항

공 종	단위	당 초	변 경	증・감	비고
◎빗물받이 및 연결관 준설
인력준설(1호)	개소	700	1,400	증) 700
인력준설(2호)	개소	150	250	증) 100
횡단빗물받이 인력준설	m	250	670	증) 420
흡입식준설(1호)	개소	20,800	31,000	증) 10,200
흡입식준설(2호)	개소	11,000	11,100	증) 100
흡입식준설(횡단빗물받이)	m	200	200	-
◎연결관세정	개소	800	800	-

5. 공사비

❍ 공사금액 변경현황

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․ 감		비고
				변동	금 액
총공사비	원	495,080,000	695,080,000	증	200,000,000
도급비	원	495,080,000	695,080,000	증	200,000,000
이설비및기타	원	-	-		-

※ 단순 물량 증감으로 일상감사 및 설계변경심사위원회 심사제외 대상

6. 예산과목

- 하수도 및 지하수 관리, 하수관 개량 및 시설물 관리, 빗물받이 및 연결관 준설,   시설비 및 부대비, 시설비(구비)

· 도급비 변동사항 없음(175,980,000원)

- 물순환안전국 물재생계획과(공기업 하수도 사업 특별회계), 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비(시비)

· 도급비 변동사항 없음(124,077,930원)

- 재해 및 재난 예방, 재난대비 복구체제 강화(재난관리기금), 재난예방활동 및 응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

· 도급비 변동사항 없음(195,022,070원)

- 안전총괄실, 안전총괄과, 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 응급복구(재난계정), 시설비및부대비, 시설비(시비)

· 도급비 : 당초 0원 → 200,000,000원

붙  임   1. 관련 방침서 각 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 변경설계서 1부.

4. 제비율 검증서 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 설계변경 계약심사 결과 관련공문 각 1부.  끝.

주무관							박강현			치수팀장					서재영					안전치수과장					代김종일						안전건설교통국장 직무대리					김태중
부구청장							김진만			구청장					11/21 이성헌
협조자				주무관						양지숙					계약팀장							문혜선					재무과장								하인철
기획재정국장							강환복
시행			안전치수과-21919									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/			http://www.sdm.go.kr
전화		02-330-6759						/전송			02-330-8945					/															/	부분공개(5)