아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	백제집자리 유구보호각 증개축공사 기본 및 실시설계 용역 계약변경(준공기한 연장)

1. 한성백제박물관 총무과-28915(2022.11.21)호와 관련입니다.

2. 우리 박물관에서 추진중인「백제집자리 유구보호각 증개축공사 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 계약변경(준공기한 연장)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 백제집자리 유구보호각 증개축공사 기본 및 실시설계 용역

나. 계약업체 : ***************

***********************************

다. 계약금액 : *****************************

라. 용역기간 : 2022. 4. 28. ~ 2022. 11. 23.

마. 변경내용(준공기한 연장)

구분	변경전	변경후	비고
용역기간	2022. 4. 28 ~ 2022. 11. 23	2022. 4. 28 ~ 2022. 12. 15	증22일(금액 변경 없음)

- 변경사유 : 행정절차 지연에 따른 용역기간 연장

- 지연배상금 : 미부과

붙임  1. 백제집자리 유구보호각 증,개축공사 기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 연기공문(용역사) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관	민흥기		주무관	윤희숙		총무과장	11/21
代권석진
협조자	주무관	최에스더
시행	총무과-28921	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, (태평로1가)	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2133-5317	/전송	02-2133-0828	/	gfufg@seoul.go.kr	/	부분공개(5)