문서번호	도시철도설비부-28156
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장
강신영	조준규	11/21
		김중영

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)
설계변경(총차·1차 1회) 및 2차 계약 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)

설계변경(총차·1차 1회) 및 2차 계약 검토

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구) 실정보고 및 물가변동 증액 관련한 설계변경 및 1차공사 준공기한 도래에 따른 2차공사 계약을 시공사에서  요청함에 따라 이에 대해 검토하고 보고드림

1		관 련 근 거

*************************************************************************

****************************************************************************

****************************************************************************

2		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)

ㅇ 공사구간: BN2 제어범위(2km800)~BN6(12km905)

ㅇ 공사기간:*******************************************************

ㅇ 공사내용: 신호보안설비공사(본선 10.105km), 신호기(표지) 152기,
선로전환기 10대 설치 등

ㅇ 공 사 비:*****************************

ㅇ 시 공 사: (주)서우건설산업 대표 이종근 외 2개사

ㅇ 감 리 단: ㈜에이알텍 대표 이상남

ㅇ 공사추진경위

- 2021.07.19.: 착공

- 2022.07.08.: 선행공정 지연에 따른 1차 공사 준공기한 연장

(2022.07.18. → 2022.11.30.)

3		설계변경 내용

ㅇ 설계변경 개요

구 분		당 초	변 경	비고
**	****	*********************	*********************	*****
	****	**************	**************	*************
**	****	*********************	*********************	*****
	****	**************	**************	*****

ㅇ 설계변경 주요 내역

*****************************

**********************************************

*******************

*************************************************************************************************************

ㅇ 금액 증감 내역

- 총차 1회: ****************

(단위: 원)

구분	당초	변경	증감
*******	***************	***************	************
********	***************	***************	************
********	***************	***************	***
*******	*************	*************	************

********	*************	*************	*********
*********	*************	*************	***********
***************	*************	*************	*************
*******	***************	***************	*************
*********	**	*************	*************
*********	*	*************	*************
*****	***************	***************	*************

- 1차 1회: 증감없음

(단위: 원)

구분	당초	변경	증감
*******	***************	***************	*************
********	*************	*************	***********
********	***************	*************	*************
*******	*************	*************	***********
********	************	************	***********
*********	*************	*************	***********
***************	************	************	*********
*******	***************	***************	*************
*********	***	************	************
*********	***	************	************
*****	***************	***************	***

4		2차 공사 계약 추진

ㅇ 원가 내역서

(단위: 원)

**	**	**	**
*******	***************	***************	***************
********	***************	*************	*************
********	***************	*************	***************
*******	*************	*************	*************

********	*************	************	*************
*********	*************	*************	*************
***************	*************	************	*************
*******	***************	***************	***************
*********	*************	************	************
*********	*************	************	************
*****	***************	***************	***************

ㅇ 주요 공사 내역

****	*******	**
********	************************
*******	***********

5		건설사업감리단 검토 결과

ㅇ 금회(1차) 설계변경은 기 보고 및 서울시의 승인 득한 현장실정보고에
근거하여 작성된 설계변경 건으로서 제반 내용이 적정한 것으로 판단됨

ㅇ 1차공사가 완료단계에 있음을 감안, 원활한 공사추진을 위하여 2차공사계약을 추진함이 타당함

6		조 치 의 견

ㅇ 위 실정보고 사항에 대해 검토한 결과 건설사업감리단 검토 보고
내용이 적정하다고 판단되어 변경 계약 및 2차공사 계약을 의뢰하고자 함

붙임  건설사업감리단 설계 변경 및 2차 계약 요청 보고서 1부.  끝.