문서번호	급수운영과-33958
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
정원훈	代장형준	최춘근	11/22
			박기용
협 조
	행정지원과장		이영세
	주무관		신중선
	주무관		차승현

준공시행 결과보고

(영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2022.  11. 21. (월)

강남수도사업소

(급수운영과)

준공시행 결과보고

우리사업소에서 시행중인 「영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 책임감리기관인 서울시설공단으로부터 준공검사【감독】 조서가 접수되어 아래와 같이 준공검사 보고함

※ 관련공문: 준공검사(감독) 조서 제출[공사감독2처-13214(22.11.07.)호]

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요: D= 13~150mm, L=817m

ㅇ 계약금액: ***********원

ㅇ 공사기간: 2022.05.02. ~ 2022.10.28.

ㅇ 예산과목: **********************************************

□ 준공검사 현황

ㅇ 검사일자: 2022. 11. 04.(금)

ㅇ 검 사 자: **************

ㅇ 검사대상

- 밸브실: 심도 및 변실(조적) 상태

- 관  로: 부설 연장

ㅇ 준공금액: ***********원

안전조사과 지적사항 반영 기 지출금액에서 감) 2,431천원

계약금액(원)	준 공 금 액(원)			잔 액(원)
***********	*	******	******* ************	**********
	***********	***********	***********
		***************

- 본부 안전조사과 지적사항 반영: 주철관 절단공 중복계상[***********]

· 계약심사 및 안전관리 이행실태 점검결과【안전조사과-28058(22.11.18.)호 】

- 기 지출금액: 기성(1차) 및 노무비 지급

· 1차 기성: ***********원

· 9월 노무비:**********원

□ 준공검사 검토결과

ㅇ 물량 및 수량내역서 검토: 이상없음(안전조사과 지적사항 반영)

구 분	검토항목	검토결과	비고
1. 토공	아스팔트포장절단(200mm이하) 등	이상없음
2. 부설공	주름마디 스텐관 부설공(20mm) 등	주철관 철거공 중복계상 검토
3. 구조물공	원형밸브실 설치공(기초재활용플리스틱,80mm) 등	이상없음
4. 부대공	하수도 복구공 등	이상없음
5. 기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	적정반영

○ GIS 속성자료 : 제출완료

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인 : 이상없음

○ 통수전 수질검사 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인 : 이상없음

□ 조치의견

ㅇ 서울시설공단에서 제출한 준공검사【감독】조서 및 본부 안전조사과 지적사항을 반영하여 위 내용과 같이 준공되어 계약상대자인 ****************에게 도급비가 지급될 수 있도록 정산을 시행하고자 합니다.

붙임  기성검사(감독) 1회 서류 등 각 1부.