문서번호	설비부-32591
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	도시철도설비부장
박근형		代임현철	11/22
			김중영
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 현장여건 변경 및 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	*******	**	**************************	***********
		**	**************************	**********
		**	*************************	***********

○ 건설사업관리단 : *************************

2		관련근거

○ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 요청 [청소년정책과-15502('21.09.15.)]

○ 통합건축T/F회의 개최 결과보고(4차) [건축부-25156('22.06.22.)]

○ 통신공사 실정보고 사항에 대한 검토 보고 [시립CM 제2022-464호 ('22.11.21.)]

3		검토내용

○ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영

- 시립청소년 음악창작센터의 효율적인 운영을 위한 건축 실배치 변경에 따른 통신배관,배선 변경 필요

- 실별 보안을 위한 출입통제장치 추가설치 및 규격변경(카드인식 및 지문인식) 필요

- 건물 보안을 위한 옥외 및 실내 CCTV 추가 설치 및 관제 모니터 규격변경 필요

○ 주요 변경내역

(단위: 천원)

공 종	변 경 내 용	변 경 사 유	변 경 금 액 (직 접 비)
******	******************	************************************	*************
******	***************	****************************************	*************
****** *****	***************	****************************************	*************
******	***************	****************************************	*************
******	******************** *************** ************* ***************	************************************** *********************************************** ****************************************	*************
******	************** ************** ******************* ***************	************************************ ****************************************	*************
******	******************	**********************************	*************
******	***************	****************************************	*************
*************			***********

○ **************************

구 분	신규단가 적용 근거	비 고
**** *****	****** ******************************** ******************************* ********************************* ************************************** ****************** *************************************** *******************

○ 관급자재 변경내역                                         (단위: 천원)

품명	규격	수량(개)			비고	변경금액
		당초	변경	증·감
******	*******	*	*	*	****	*********
	******	**	**	*******	****
	******	**	**	*******	****
	**********	*	*	*******	********* *******
	**********	*	*	*******
	**********	*	*	*******	****
	*******	*	*	*******	****************
	*******	*	*	*******
	*********** *************	*	*	*******	****************
	*********** *************	*	*	*******
	**************	*	*	*******	****************
	***********	*	*	*******
	**************	*	*	*******	****************
	***********	*	*	*******
	******	*	*	*******	********* *******
	******	*	*	*******
	*********	*	*	*******	****
	*****	*	*	*******	****
	*********	**	*	*******	********* *******
	*********	*	**	*******
	*********** ***************	*	*	*******	********* *******
	*********** **************	*	*	*******
	********	*	*	*******	****
	******	*	*	*******	****

품명	규격	수량(개)			비고	변경금액
		당초	변경	증·감
*******	********** ******	*	*	*******	**** ****** ****** ********	*********
	****	**	*	*******
	***********	**	*	*******
	*************	*	*	*******
	***************	*	*	*******
	***********	**	*	*******
	*******	**	*	*******
	*******	*	*	*******
	*********** **************	*	*	*******
	*********** ****************	*	*	*******
	***********	*	*	*******
	******	*	*	*******
	********** *************	*	*	*******
	****	*	**	*******
	*******	*	*	*******
	************	*	*	*******
	***********	*	**	*******
	*************	*	*	*******
	***************	*	*	*******
	***********	*	**	*******
	*******	*	**	*******
	*******	*	*	*******
	*********** **************	*	*	*******
	*********** ****************	*	*	*******
	***********	*	*	*******
	******	*	*	*******
******	*******	*	*	*******	****	*********
	******* *********	*	*	*******	****
	******	*	*	*	****
	*****	*	*	*******	****

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현장여건 변경 및 운영자(서경대학교) 요청사항을 반영하여 변경 시공함이 타당하다고 판단되며, 실정보고에 대한 검토결과 적정함.

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 공사에 필요한 관급자재는 계약부서(총무부)에 변경 구매 의뢰하고자함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.