아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰【서초1중블록 공급체계 구축공사】

우리 사업소에서 시행중인 『****************』에 대하여 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: ****************

나. 계 약 자: **************

다. 계약금액: *************************

라. 공사기간

****************************************

**************************************** (총 185일 연장)

※잔여공정 준비(10일) 및 작업소요일수(41일), 설계변경 준공처리등(37일), 도로굴착통제(97일)

마. 연기사유 귀책소재: *******

바. 지체상금 부과여부: ***

사. 연기사유

- ****************************************************************************************

붙 임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 관련서류 각 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	박찬수		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	11/22
문병희
협조자
시행	시설관리과-34819	(	2022.11.22	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소(시설관리과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/	mcl88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)