문서번호	시설보수과-26871
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		안종필	11/23
			윤창진
협 조

슬러지 저장시설 설치사업 준공기한 연기보고

2022. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

슬러지 저장시설 설치사업 준공기한 연기보고

『슬러지 저장시설 설치사업』에 대한 보험료 등 정산을 위하여 관련 사업의 준공기한을 연기하고자 함.

1	관련근거

□ ***************************************************

□ **************************************************

2	사업개요

구 분	설치공사	설치공사 감리용역	전기공사
사 업 명	******** ****	******** *********	******** *******
사업기간	***************	****************	*****************
계약금액	***************	************	************
계약업체	******** *******	******** ******	****

3	보고내용

□ 실공사 투입지연

○ 착공일(*******) 공사현장에 적체된 슬러지로 인하여 공사추진이 불가 하였고, 적체된 슬러지 외부 반출일********** 이후 공사 실투입******** 되었음

○ 다만, '22년도내 공사준공 목표 시공에 만전을 기하여 '22.12.31 까지            슬러지 저장시설 건축공사 완료 가능함

□ 연기사유

○ 준공시 제출하는 보험료**********************의 납입         증명서 발급이 '22.12.31.까지 근로자 투입 이후 '23년 1월중 발급되어           '22.12월내 정산이 불가하여 '23.1월까지 준공기한 연기 필요

4	조치계획

□ 사업별 준공기한 연기시행

구 분	설치공사	설치공사 감리용역	전기공사
사 업 명	******** ****	******** *********	******** *******
당 초	*******************	*******************	*******************
변 경	*******************	*******************	*******************

□ 귀책사유 여부 : 계약자 귀책사유가 없어 지체상금 미 부과

붙임 1. 업체 실정보고 공문서 2부.

2. 사업별 합의각서 3부.  끝.