문서번호	도시철도토목부-29929
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	11/23
			류용열
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고 검토

2022. 11

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고 검토

건설사업관리단으로부터 제출된“터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고”건에 대한 검토보고임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2022-575호(’22.11.21)

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의1. 가의 2)항

- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 98,450백만원 (4차공사 17,090백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (4차공사 ’22.1.1.∼’22.12.31.)

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ 단선터널 암판정 [상 선]

- ’22.09.15.(목) 상선 STA 0km175.4, [설계 PS-4B ⇒ 적용 PS-4B]

- ’22.09.30.(금) 상선 STA 0km159.4, [설계 PS-4A ⇒ 적용 PS-4A]

ㅇ 복선터널 암판정 [작업구#3 → 작업구#2]

- ’22.09.15.(목) 종점 STA 4km643.5, [설계 PD-5B ⇒ 적용 PD-5A]

- ’22.10.05.(수) 종점 STA 4km583.5, [설계 PD-5B ⇒ 적용 PD-5B]

- ’22.10.14.(금) 종점 STA 4km551.0, [설계 PD-5A ⇒ 적용 PD-5B]

- ’22.10.28.(금) 종점 STA 4km491.0, [설계 PD-5B ⇒ 적용 PD-5B]

- ’22.11.03.(목) 종점 STA 4km466.0, [설계 PD- 6 ⇒ 적용 PD-5B]

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 실정보고 사유

- 암판정 결과 및 복선터널 접속부 보강에 따른 시공 물량 변경 및 공사비 변경 필요

ㅇ 변경 현황

구 분	당 초				변 경				증 ․ 감
단선터널 <상 선 > 58.8/669.4/ - (금회/누계/잔여)	지보패턴	PS-4A PS-4B	0.6m 8.4m		지보패턴	PS-4A PS-4B	- 9.0m		감) 증)	0.6m 0.6m
	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 강관다단보강 훠폴링설치 선대구경보링	2,565㎥ 364㎥ 533개 57조 135공 91개 29M		수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 강관다단보강 훠폴링설치 선대구경보링	2,565㎥ 363㎥ 534개 57조 135공 91개 58M		감) 증) 증)	- 1㎥ 1개 - - - 29M
복선터널 330.0/3,472.7/503.5 (금회/누계/잔여)	지보패턴	PD-5A PD-5B PD- 6	56.0m 92.5m 181.5m		지보패턴	PD-5A PD-5B PD- 6	30.0m 300.0m -		감) 증) 감)	26.0m 207.5m 181.5m
	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치	25,574㎥ 1,084㎥ 834개		수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치	25,543㎥ 1,048㎥ 1,297개		감) 감) 증)	31㎥ 36㎥ 463개
복선접속부 보 강	수량	보강락볼트 설치 숏크리트 타설 막장면 콘크리트 터널방수쉬트		- - - -	수량	보강락볼트 설치 숏크리트 타설 막장면 콘크리트 터널방수쉬트		6개 2㎡ 2㎥ 6㎡	증) 증) 증) 증)	6개 2㎡ 2㎥ 6㎡

ㅇ 단가 적용 현황

- 기존 계약내역의 물량증감에 대해 기계약 단가 적용

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위:천원)

구 분	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
단선터널 암판정 및 패턴변경	*******	*******	**	******
복선터널 암판정 및 패턴변경	*********	*********	**	******
복선터널 접속부 수량 변경	*	*****	**	*****
▸직접공사비 계	*********	*********	**	******
▸제 경 비	*******	*******	**	******
▸도 급 액 계	*********	*********	**	*******
▸관급자재비	*******	*******	**	***
▸폐기물처리비	******	******	**	***
▸총 공사비	*********	*********	**	*******

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 단선 및 복선터널 암판정 결과 반영 및 복선터널 접속부 보강 반영 건에 대하여 공사계약 일반조건 제7절 1항에 의거 변경되는 공사비*************는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의“터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고”건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고져 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.