아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연장 의뢰(신림공영차고지(저류조포함) 건설 소방공사)

우리 본부에서 추진중인「신림공영차고지(저류조포함) 건설 소방공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 연장내용

계약번호	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
20210614EBC-01	소방공사	(주)보성티엔씨	총차	966,272,200	2023.12.20.	변경없음
			1차	40,000,000	2022.12.31.	2023.11.30.

2. 계약금액 : 변동없음

3. 연기사유 : 선행공종(건축) 공정추진 지연에 따른 후속공종(소방) 준공기한 연장

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연장 검토보고  1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김세익		도로설비과장	代임현철		설비부장	11/23
김중영
협조자
시행	설비부-32677	(	2022.11.23	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	openland88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)