문서번호	도시철도토목부-29976
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	11/24
			류용열
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

단선터널 방향전환소 패턴 및 수량변경 실정보고 검토

2022.  11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

단선터널 방향전환소 패턴 및 수량변경 실정보고 검토

건설사업관리단으로부터 제출된 “단선터널 방향전환소 패턴 및 수량변경 관련 실정보고” 건에 대한 검토보고 임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2022-568호(’22.11.18)

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의 1. 가의 1)항

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 98,450백만원 (4차공사 17,090백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (4차공사 ’22.1.1.∼’22.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ ’21.06.01 : 접속부 보강공법계획 관련 원설계자 의견 회신

ㅇ ’21.08.24 : 방향전환소 보강 시공상세도 승인(건설사업관리단)

ㅇ ’22.04.26 : 무진동암파쇄 구간 방향전환소#1 굴착방법 원설계자 의견 회신

ㅇ ’22.08.09 : 방향전환소 훠폴링 추가설치 관련 원설계자 의견 회신

ㅇ ’22.08.19 : 방향전환소 설치 사유 및 미설치 가능여부 관련 원설계자 의견 회신

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 실정보고 사유

- 방향전환소 관련 굴착방법 변경(발파→무진동암파쇄), 암판정 결과에 따른 패턴변경, 시공상세도에 따른 보강 수량 변경 등 반영 필요

ㅇ 변경 현황

구 분	당 초		변 경		증 · 감
방향전환소	굴착(발파) 굴착(무진동) 격자지보 설치 락볼트 설치 훠폴링 설치	1,117㎥ - 27조 402개 45개	굴착(발파) 굴착(무진동) 격자지보 설치 락볼트 설치 훠폴링 설치	899㎥ 227㎥ 33조 420개 291개	감) 증) 증) 증) 증)	218㎥ 227㎥ 6조 18개 246개

ㅇ 단가 적용 현황

- 기존 계약내역(굴착(발파), 격자지보, 락볼트, 훠폴링) 물량증감의 경우 기 계약단가 적용

- 굴착(PCD-1,무진동암파쇄)의 경우 신규단가 반영[***************]

공 종 명	규 격	단위	적 용 단 가(단위:원)		비 고
			설계가	적용단가
전단면 굴착 (무진동암파쇄)	방향전환소 (PCD-1)	㎥	*******	*******	***************

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위: 천원)

구 분	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
방향전환소 패턴 변경	*******	*******	**	******
방향전환소 보강공법 변경	*****	*****	**	******
방향전환소#1 굴착공법 변경(발파→무진동)	******	******	**	******
▸직접공사비 계	*******	*******	**	******
▸제 경 비	******	******	**	******
▸도 급 액 계	*******	*******	**	*******
▸관급자재비	******	******	**	*
▸폐기물처리비	*****	*****	**	***
▸총 공사비	*******	*******	**	*******

ㅋ`

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 단선터널 방향전환소 관련 변경 건에 대하여 공사계약 일반조건 제7절 1항에 의거 변경되는 공사비*************는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

□ 원설계자 검토의견

ㅇ STA. 0km270 단선터널 굴착방안은 무진동 굴착구간으로 방향전환소 또한 무진동 굴착 적용 필요

ㅇ 터널 보조공법 적용은 터널 보강계획 도면을 참조하되, 막장 암판정 결과를 반영하여 시행여부 또는 계획 추가, 변경 필요

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의 “단선터널 방향전환소 패턴 및 수량변경”건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고져 함.

붙 임 : 1)건설사업관리단 공문 1부.

2)신규단가 협의서류 1부.  끝.