문서번호	원수관리과-21850
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		노지문	11/24
			어용선
협조

설계변경 시행보고

(강북통합취수장 염소투입설비 제조·구매설치)

2022. 11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

설계변경 시행보고

(강북통합취수장 염소투입설비 제조·구매설치)

우리 센터 취수장 염소투입설비 제조·구매설치 사업과 관련하여 설계변경 사유가 아래와 같이 발생 되어 설계변경을 시행하고자 보고드림.

사업의 개요

□ 사 업 명 : 강북통합취수장 염소투입설비 제조·구매설치

□ 계약금액 : 금514,620,020원(금오억일천사백육십이만이십원)

□ 계약일자 : 2022.  4.  11.

□ 착수일자 : 2022.  4.  14.

□ 납품기한 : 2022. 11.  30.

□ 계 약 자 : ㈜태현이엔지, (부산시 사하구 감천항로 221-9(구평동))

□ 주요 사업내용

○ 염소 기화기(강북 1호) 1대 구매·설치

○ 염소 투입기(뚝도 1호) 1대 구매·설치

○ 인젝터 구매·설치 : 2인지 2대(구의 1,2호), 3인 3대(강북 1,2,3호)

○ 현장 제어 판넬 구매·설치 : 2면(구의, 뚝도)

○ 진공배관(PE) 교체 : 강북, 뚝도

○ 부대설비 : 자동절체밸브(구의,뚝도), 가스누설경보기(강북) 외 6건

설계변경 계획(안)

□ 설계변경 내역(총괄)

(단위:원)

계약금액(변경전)	변경금액(변경후)	감액금액	비고
514,620,020	507,705,000	6,915,020	정산(감액)

□ 변경내용 : 보험료 등 경비 실제 정산

□ 변경사유 세부내용

○ 경비정산

- 보험료, 퇴직공제부금비, 기타경비, 검사 수수료 등 계약자가 실제 적용 금액으로 정산(감액)

□ 설계변경 세부내역

(단위:원)

구분	금액		증 · 감	비고
	당초	변경
기자재비	371,010,000	370,845,000	-165,000
재료비	16,487,585	16,487,585
노무비	53,527,043	53,527,043
산출경비	0	0
산재보험료	1,980,500	1,980,500
고용보험료	540,623	540,623
건강보험료	1,655,548	0	-1,655,548
연금보험료	2,131,607	0	-2,131,607
노인장기요양보험	203,135	0	-203,135
산업안전보건관리비	1,181,409	1,181,409
퇴직공제부금비	1,089,488		-1,089,488
기타경비	4,060,848	4,060,848
일반관리비	4,971,467	4,666,680	-304,787
이윤	9,616,419	8,879,602	-736,817
고재처리비	-619,290	-619,290
공급가액	467,836,382	461,550,000	-6,286,382
부가가치세	46,783638	46,155,000	-628,638
총 계	514,620,020	507,705,000	-6,915,020

조치계획

□  설계변경 계획(안)에 대해 자체 설계변경 심의위원회 개최

□  설계변경 심의위원회 결과에 따라 설계변경 시행

붙 임  1. 검증확인서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 정산 내역서 1부.  끝.