문서번호	미래첨단교통과-4937
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
오수년		가순종	11/24
			이수진
협조	주무관		김경진
	주무관		김영민

충전형 BIT 시범설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  11. 23. (수)

도 시 교 통 실

(미래첨단교통과)

배터리를 이용한 BIT 시범설치 계획 보고

미래첨단교통과장 :이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 오수년☎4970

버스도착정보의 안정적 안내를 위하여 가로등 전원을 활용한 충전형 BIT를 시범 설치·운영하고자 아래와 같이 보고드림

□ 현황 및 문제점

ㅇ 전기 수전점이 정류소와 원거리에 위치하여 BIT 설치비 보다 굴착복구비 과다 발생으로 예산의 효율적 집행 한계

- ’22년 사업 굴착복구비 납부 현황 : 종로구 6개소(56m) 20,000천원

ㅇ 전기 지중선 단선 시 굴착협의 및 공사비 과다로 복구 지연

ㅇ 정류소에서 수시 발생하는 이설에 따른 안정적 서비스 버스정보 안내 필요

□ 그간의 추진 사항

ㅇ (태양광 BIT) 계절, 날씨, 주변환경 등의 영향으로 양질의 전원확보 불가

ㅇ (EPD, 저전력전자종이) 겨울철 기온 저하 시 잔상으로 인한 화면 오류 발생

□ 개선방안

ㅇ 정류장 주변 인근(30m 이내) 가로등 전원 활용

- (야간) 가로등 전원을 BIT 전원으로 사용 및 배터리 충전

- (주간) 야간 배터리에 충전된 전원 사용

ㅇ 제품구성 : 외함, 배터리, 소화장치, 급·배기펜, 히터, 누전차단기 등

ㅇ 회로 구성도

회로 구성도	배터리함 도면

ㅇ 적용대상 : BIT(3단 6열, 표지판 또는 승차대) 소비전력 25w이하

□ 추진계획

ㅇ 시범 설치 개요

- 설치위치(2대) : 덕성여중고(01-130), 황학동(02-273)

- 설치기간 : 2022.11.~12.

- 소요예산 : 16,500천원(5,500천원×3대, 예비품 1대 포함)

ㅇ 추진방법 : ’22년 BIT 설치사업 포함하여 시행(설계변경 및 정산)

□ 향후 추진계획

ㅇ ’22. 12. ~ ’23. 12. : 주기적 점검 및 모니터링 실시

- 점검내용 : BIT 정상작동 여부 확인, 전기설비 및 배터리 점검

- 점검방법 : 현장 확인(매월 4회) 후 점검결과 보고

ㅇ ’23. 12. : 시범운영 결과 보고

- 운영결과 발생한 문제점 등을 분석하여 확대 여부 등 검토

□ 기대효과

ㅇ 버스도착정보 제공으로 시민편의 및 보편적 교통복지 제공 기여

ㅇ 예산절감(굴착복구비 및 공사비) 기여.  끝.