문서번호	시설관리과-41168
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최병민		강태진	11/24
			이동욱
협조
	행정지원과장		代정혜경

「2022년 약수역·월곡역 전식방지시설 보수 전기공사」 설계변경(정산) 계획

「2022년 약수역·월곡역 전식방지시설 보수 전기공사」

설계변경(정산) 계획

2022. 11. 24.(목)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2022년 약수역·월곡역 전식방지시설 보수 전기공사」

설계변경(정산) 계획

「2022년 약수역·월곡역 전식방지시설 보수 전기공사」 사업에 대한 설계변경(정산) 계획을 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 2022년 약수역·월곡역 전식방지시설 보수 전기공사

ㅇ 계약기간: 2022. 9. 26. ~ 2022. 11. 30.

ㅇ 도 급 자: *********

ㅇ 내    용: 약수역, 월곡역 전식방지시설 보수

□ 계약금액 증액

구분	당초	변경후
계약금액	************	************ **************

ㅇ 증액 사유

**************************

장 소	공종	수량	총액 (원)	재료비 (원)	노무비 (원)	경비 (원)
* * *	******	***	*********	*	*********	******
	*****	**	*******	*******	*******	******
	******	**	*******	*******	*******	*****
	**	*	*********	*******	*********	******
* * *	*****	**	*******	*	*******	*****
	*****	**	*******	*******	*******	******
	******	**	******	*	******	*****
	******	**	*******	*******	*******	*****
	**	*	*********	*******	*********	******
	** *********	*	*********	*********	*********	******

*********************************************

************************************************

***********************

장 소	공종	수량	총액 (원)	재료비 (원)	노무비 (원)	경비 (원)
* * *	******	****** ***	*********************	*****	*********************	*****************
	****	***	*********	*	*********	******

***********************************************************************************************

※ 참고 사진

(약수역) 퓨즈 및 퓨즈함 교체	(월곡역) 퓨즈 및 퓨즈함 신설	(월곡역) 전선관 철거 및 설치
	여백

□ 보험료 정산

ㅇ 고용보험, 산재보험 외 미지급

- 공사 기간이 30일 이상인 경우, 경비(건강보험료 등) 지급하여야 하나, 본 공사 참여 근로자 중 일용직 근로자가 없음을 확인하였으며, 또한 증빙서류가 없는 경비(건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금비) 미요구에 동의함에 따라, 경비(건강보험료 등) 미지급

□ 행정사항

ㅇ  2022. 11. 25. 설계변경 심의위원회 개최

ㅇ  2022. 11. 25. 계약 변경 의뢰(시설관리과 → 행정지원과)

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.