문서번호	교량안전과-34185
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍		강천수	11/24
			조현석
협조

[2022년 한남대교(상류교)보수공사]

설계변경(1회, 정산) 시행 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

교량안전과

[2022년 한남대교(상류교)보수 공사]

설계변경(1회, 정산) 시행 검토 보고

『2022년 한남대교(상류교) 보수 공사』추가 포장 및 제경비 사후정산, 고용  개선지원비 등 반영에  대한 설계변경(제1회, 정산) 보고 임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관합 법률 시행령 제74조

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경),제7절(계약금액의 조정)

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명	2022년 한남대교(상류교) 보수 공사	공사기간	2022. 4. 25.~2022. 11. 30.
공사규모	절삭 후 아스팥트 덧씌우기 : 172.9a 교면방수 : 17,292㎡, 상판보수 : 346㎡ 유공관 및 성형줄눈 : 1,968m, 주입줄눈 1,572m 차선도색 등 부대공 1식
공사비	총 공사비 : 2,900,000,000원 도급비2,027,822,400원, 관급비440,500,000원, 이전비 등 기타 431,677,600원
계약상대자	(주)성원특수건설 대표 이영자

Ⅲ		설계변경 주요내용

≪주요 설계변경 사항≫

□ 노후 포장 추가 정비에 따른 물량 및 실 시공물량 반영

▶ 노후 포장 망상균열, 소성변형 등이 광범위하게 발생(하류교 WA1~WP4)하여 동절기, 해빙기

포트홀 등으로 사고 사전예방

▶ 최근 정비한 버스정차대앞(상류교 EP22~EP23) 포장(LMC)은 중복에 의해 사업제외

□ 관급자재 및 이전비 수량 변동에 따른 증·감 반영

□ 건강보험, 국민연금보험, 고용개선지원비 등 제경비 정산결과 반영

※ 건설사업자(동명기술공단) 설계변경 도서 제출 : 동기공 2022-6316호(2022.11.21.)

□ 주요 공종별 물량 변경 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증.(△감)
포장공	절삭 후 아스팔트 덧씌우기	a	172.92	192.63	19.71
	AP 및 방수층 제거/바탕정리	a	172.92	192.63	19.71
	교면방수	㎡	17,292	19,263	1,971
콘크리트보수공	상판제거/보수	㎡	346	94.4	(△251.6)
부대공	차선도색(5종)	m	5,225	5,349	94
관급자재	아스콘(표층용 wc-6)	톤	3,316	3,988	672
폐기물처리	폐콘크리트	톤	24	7	(△17)
	폐아스콘	톤	3,251	3,873	622

□ 설계변경 적용 단가

○ 단가적용 협의

- 신규비목 : 설계변경 당시 기준 산정 단가에 낙찰율(88.352%) 적용

- 계약초과 수량에 대한 단가 : 계약단가 적용

< 신규비목 적용 현황>

구 분	규 격	단위	설계단가	단가산출		신규비목 적용수량	신규비목 적용금액(원)	비고
				낙찰율	적용단가
차선규제봉 설치	∅225mm x 20mm, H=750㎜(부착식)	EA	69,994	87.251%	61,068	104개	6,351,072

□ 공사비 증·감 현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · (△감)		비 고
총사업비	2,900,000,000	2,900,000,000		-
도 급 액	2,027,822,400	1,931,400,000	(△감)96,422,400		(△감)4.75%
관급자재	440,500,000	487,390,000	46,890,000
이전비등	431,677,600	481,210,000	49,532,400

Ⅳ		책임건설사업자 검토의견

□ 설계변경 적정 여부 검토

○ 포장추가 구간 실시공 정산수량의 적정성 검토  : 적정

○ 주요 수량 및 공사비 적정성 : 적정

○ 제경비(보험료 등) 주요 항목의 사후 정산 적정성 : 적정

○ 고용개선지원금 공사원가 반영 적정 여부 : 적정

○ 관급자재 및 이전비(폐기물 외) 처리비 정산 적정성 : 적정

□ 설계변경 검토의견

○ 한남대교(상류교) 보수공사 설계변경은 추가 포장(사업예산 집행 계획 변경)에 의한 사항 및 시공 수량 정산 물량 반영, 제경비 항목 사후 정산, 관급비 및 이전비 정산 등에 대한 사항으로서 관련 기준에 적합하게 작성되었기에 본 설계변경은 타당 하다고 사료됨.

Ⅴ		조 치 의 견

○ 추가 포장구간에 따른 실시공 물량,  및 공사비 정산 등에 의한 도급비 변동액은 약4.75%(≒96,422천원) 감액되며, 제경비 및 관급비, 이전비 등 제반 규정에 따라 정상적으로 정산됨.

○ 고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼(ver.4.0, 2022.1.) 반영에 대하여 검토한 바, 적정 정산처리 됨.

- 고용개선지원비 반영 현황

구 분	지원대상		반 영 액
주휴수당	주 5일 이상 근로자 : 미발생		-
고용개선지원비	국민연금·건겅보험	35세미만 청년층 및 저임금(월224백만원) : 미발생	-
	고용개선장려금	고용실적 우수사업장 : 미신청	-
	전자인력단말기	실비정산	1,200,000원
합 계			1,200,000원

○ 상기 검토의견과 같이 건설사업관리단에서 보고한 설계변경건은 적정한 것으로 판단되며, 신규 단가는 1개(시선유도봉) 공종으로서 5천만원이하 이므로 계약심사 및 자체 설계변경 위원회를 계최하지 않고 설계변경 계약을 의뢰하고자 함.

※ 설계변경 심사(자문)기준

① 계약심사대상(입찰및집행기준) : 20억 이상 1회 계약금액 10% 증액시

② 설계변경 자문회의 운영 개선(교량안전과-15132호,'20.10.14) : 5,000만원 이상 신규비목

Ⅵ		향 후 계 획

○ ‘22. 11.  25. 설계변경 및 변경계약 의뢰

○ ‘22. 12.  02. 준 공 검 사

붙 임 : 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 계약금액 검증 확인서 1부.   끝.