문서번호	기전과-31131
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박요셉		11/24
		김은덕
협조

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(4차 작업지시)

2022.  11. 24. (목)

동부도로사업소

(기전과)

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(4차 작업지시)

2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련 감리 업체로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 제4차 작업지시[2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)]

ㅇ 기전과-29860호(2022.10.31.)

□ 제4차(추가) 작업지시[2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)]

ㅇ 기전과-30735호(2022.11.17.)

□ 실정보고 제출 건

ㅇ (주)주현이앤씨 주현(동부)2022-061호(2022.11.23.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2022. 3. 24. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜엠비에스엔지니어링 대표 강형주

□ 계약금액 : ********************************

□ 감리업체 : ㈜주현이앤씨 대표 이정수

3		제4차(추가포함) 작업지시 내용

□ 작업내용 : 교통신호제어기 및 신호지주 교체 등

□ 작업장소 : 한미약국 외 48개소

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 2022. 11. 30.(수)

□ 작업지시 금액 : **********************************

4		실정보고 내용

□ 주요 검토내용

구 분	현황 및 문제점	감리 의견	검토결과	비고
한미약국	① 제어기 및 신호지주 설치 위치 변경 요청 민원	① 제어기 및 신호지주 위치 변경	적 정
강일초교	① 노란신호등(차량등,보행등) 색 부조화	① 차량등 교체 시 보행등 동시 교체	적 정
개룡근린공원	① 잔여시간표시기 고장	① 잔여시간표시기(역삼각형)2조 교체	적 정
문정테라타워	① 잔여시간표시기 파손	① 잔여시간표시기(숫자형)2조 교체	적 정

□ 주요 변경내용

교차로명	품 명	규 격	구분	단위	수량			비 고
					당초	변경	증/감
한미약국 (하모니 마트앞)	신호케이블	지중1선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	187	202	15	▲증 128,931
	신호케이블	지중3선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	7	9	2
	신호케이블	지중5선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	18	0	-18
	신호케이블	지중7선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	11	20	9
	신호케이블	지중8선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	24	35	11
	전원선	지중1선, F-CV,6SQ/2C	신설	m	20	57	37
	전선관 배관	PE Ø54㎜, 1열	신설	m	29	23	-6
	전선관 배관(야간)	PE Ø100㎜, 2열	신설	m	0	5	5
	후강전선관 배관(야간)	Ø104㎜×3.6m (KSC 8401)	신설	m	50	45	-5
	소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+인력 20%	신설	m	65	59	-6
	경고테이프 설치	B=300㎜×1M	신설	m	115	109	-6
	굴착(B=0.6m) 복구 블록 포장(가복구)	소형 고압블럭 t=6~8cm	신설	m	72	66	-6
강일초교	보행신호등 및 잔여시간표시기 설치	사각/LED,1면2색/잔여공통(관급)	신설	조	0	1	1	▲증 217,774
	보행,잔여시간,보조등 철거	LED, 1면2,3색 (숫자,도형)	철거	조	0	1	1
개룡 근린공원	잔여시간표시기 설치	역삼각형, 숫자형(관급)	신설	조	0	1	1	▲증 142,027
	보행,잔여시간, 보조등 철거	LED, 1면2,3색(숫자,도형)	철거	조	0	1	1
문정 테라타워	보행신호등 및 잔여시간표시기 설치	사각/LED,1면2색/잔여공통(관급)	신설	조	1	2	1	▲증 217,774
	보행,잔여시간, 보조등 철거	LED, 1면2,3색 (숫자,도형)	철거	조	1	2	1
※ 타 세부사항은 실정보고 내역서 참조

5		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 실정보고 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 실정보고서 제출 공문 1부.  끝.