아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독1처
제목	공사실정보고 검토결과 통보(외발산지하차도 보수공사)

1. 공사감독1처-6727(2022.11.23)호 및 시설보수과-27051(2022.11.25)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독업무 시행중인 "외발산지하차도 보수공사"와 관련 "공사실정 검토보고서" 에 대한 검토결과를 아래와 같이 통보하오니, 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : "승인"

나. 기타사항

- 신축이음재 재설치 및 바탕조정재의 시공에 철저를 기하여 하자요인이 발생치 않도록 관리에 철저를 기할 것

- 조속한 시일내 승인내역을 반영하여 설계변경 내역을 제출할 것

- 동절기 품질확보를 위해 아래와 같이 공사중지 지시하니 현장정리 철저 및 사고발생 위험요인은 없는지 확인 할 것.

[공사중지 : 2022. 11. 25 ~ 2023.03.31]-계약기간 변경 예정.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	강연홍		시설보수과장	전결 11/25
임형규
협조자
시행	시설보수과-27060	(	2022.11.25	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 시설보수과 (마곡동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	kyh7321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)