문서번호	토목부-34963
결재일자	2022. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
안종현		김동철	11/25
			代김동철
협 조
	주무관			박형재

****************************

우  선  시  공     검  토  보  고

2022. 11.

도시기반시설본부

(토     목     부)

『*************************************』

삼성교 교각 등 우선 시공방안 검토

*************** 교각이 광역상수도관(D1800) 및 기존 삼성교와 간섭되어 이에 대한 설계도서를 작성하고, `23년 풍수해 기간을 감안 설계변경 승인 전 교량하부공(말뚝 및 교각) 우선 시공방안 검토보고임

□ 추진배경

❍ 삼성교 신설보도교 교각 및 말뚝 우선시공 검토보고*****************************)

❍ 현안보고 승인***************************************

□ 추진 경위

❍ '22.03~05 : 신설보도교 교각(P3)에 지장물 간섭 확인하여 변경설계 착수

❍ '22.05~10 : 설계변경 추진 및 설계도서 성과품 작성

❍ '22.11.08. : 변경설계도서(설계도면, 구조계산서) 검토 요청(시공사→감리단)

❍ '22.11.14. : 기술지원기술인 기술검토, 원설계자 조치결과 작성

□ 변경설계 주요 내용(신설보도교)

❍ 경간장 조정 : 광역상수관로 간섭으로 교각P3(양방향)을 잠실방향으로 이동

60m

30m

❍ 평면선형 변경(기술지원기술인 및 원설계자 의견 붙임 참조)

- 현황 : (잠실방향) 기존 삼성교와 신설보도교 교각 코핑 간섭(0.11m) 확인

- 처리방안 : (잠실방향) 이격거리 0.14m 확보

․ 코핑 규격 축소(3.85m→3.65m, 편측 0.1m 여유폭 확보)

․ 신설보도교 교각을 기존교량 외측으로 0.15m 이동

- 현황도

현장 실측	처리 방안

□ 교량 하부공 시행시기 검토

❍ *****************하는 구간으로서, 준공기한 내 공사완료하기 위해서는 `23년 풍수해 기간(`23.5.15~10.15.)을 감안할때, `22년 12월부터 하부 교각을 시공을 착수하여야 하는 실정임

❍ 따라서, 설계변경 전 사업의 시급성을 감안하여 삼성교 신설보도교 구간의 하부공은 우선 시공토록 하고 추후 설계변경 시행하는 것이 타당하다고 판단됨

*************(작성완료), ************(`22.12.완료 예정)

"공사계약 일반조건"」에 따라 설계변경 전 교량하부공(말뚝 및 교각)을 우선 시공가능

○ 「공사계약 일반조건」 제6절 공사 설계의 변경 1. 다.

설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료해야 한다. 다만, 계약담당자는 공정 이행의 지연으로 품질 저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

********

□ 조치계획

❍ 상기 검토의견과 같이, 삼성교 신설보도 설치관련 설계변경 내용및 시행시기에 대해 우선 승인처리하고 설계변경은 추후 변경조치코자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부(`22.11.16.)  끝.