문서번호	치수과-22911
결재일자	2022.11.25
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
한재원		김경원		민병기		11/25
						신용철
협조

「정밀안전진단(빗물펌프장, 수문 등 용역)」 사고이월 계획 검토 보고

- 정밀안전진단(빗물펌프장, 수문 등 용역) -

사고이월 계획 검토 보고

2022. 11.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 치수안전과(시비재배정) ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 정밀안전진단(빗물펌프장, 수문 등 용역) - 사고이월 계획 검토 보고

2022년 시비 재배정사업 “정밀안전진단(빗물펌프장, 수문 등 용역) ”과 관련하여 다음과 같이 사고이월 처리하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

지방재정법 제50조(세출예산의 이월)

지방재정법 시행령 제58조(세출예산의 이월)

서울특별시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제11조(이월예산의 집행)

준공기한 연기 검토보고[치수과-22820,22821호(’22.11.24.)]

Ⅱ		사업개요

하천시설물 정밀안전진단 사업현황

(단위: 천원)

연번	사 업 명	사업기간	계약금액	용 역 사	비고
소 계
1	옥수배수문 정밀안전진단 및 성능평가 용역	’22.03.03. ~ ’22.12.30.	******	㈜이젠리버텍
2	금호배수문 정밀안전진단 및 성능평가 용역	’22.03.03. ~ ’22.12.30.	******	㈜도원안전연구원

추진경위 및 향후계획

❍ ’22.03. : 옥수배수문, 금호배수문 정밀안전진단 및 성능평가 용역 착수

❍ ’22.09. : 區 건설 기술자문회의 개최

❍ ’23.02. : 市 건설기술심의소위원회 기술심의 개최

❍ ’23.03. : 용역 준공

Ⅲ		사고이월 사유 및 세부내역

사고이월 사유

❍ 관련근거: 서울시 기술심사담당관-19042호(20.11.16.)

- 문서명: 정밀안전진단용역 내실화방안 추진 철저

- 용역준공 2개월 전 심의 요청 필수, 계절적 요인에 따른 주기적 조사가 필요한 시설물은 과업기간을 최소 1년 이상 확보하여 연초(1~3월) 심의요청

※ 동절기 및 해빙기 점검 후 市 건설기술심의 및 준공까지 약 3개월 소요

- 연내 市 기술심의 개최 불가로 과업기간 연장 및 사고이월 필요

용역 과업기간 연장내역

연번	사 업 명	사 업 기 간		비고
		당초	변경
1	옥수배수문 정밀안전진단 및 성능평가 용역	’22.03.03. ~ ’22.12.30.	’22.03.03. ~ ’23.03.31.
2	금호배수문 정밀안전진단 및 성능평가 용역	’22.03.03. ~ ’22.12.30.	’22.03.03. ~ ’23.03.31.

사고이월 세부내역

(단위: 원)

구분	배 정 액	원인행위액	지 출 액	사고이월액	비고
계	***********	***********	***********	**********
시설비	***********	***********	*********** *****************	**********

Ⅳ		조치계획

서울시 사업주관부서(하천관리과)에 사고이월 요청

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 각 1부.

2. 정밀안전진단용역 내실화 방안 추진 철저 1부.

3. 정밀안전진단용역 내실화 방안 추진 계획 1부.  끝.