아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰

1. 도로시설과-29267(2022.11.21.)호와 관련됩니다.

2. 우리과에서 시행중인「도로시설물 염해 성능개선방안 수립 용역」의 변경계약(과업내용변경)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 도로시설물 염해 성능개선방안 수립 용역

나. 계 약 자: 주식회사 콘텍이엔지, 주식회사 에이앤에스

다. 계약금액: 금85,000,000원(금팔천오백만원)

라. 변경내용: 계약금액 금15,000,000원(금일천오백만원) 증액

- 당초: 금85,000,000원(금팔천오백만원)

- 변경: 금100,000,000원(금일억원)

마. 변경사유: 과업대상시설물 및 현장시험 추가

붙임  1. 변경내역서 1부

2. 합의각서 1부

3. 방침서 1부.  끝

	도 로 시 설 과 장
전문관	박진환		시설기획팀장	조창길		도로시설과장	11/22
고영준
협조자
시행	도로시설과-29281	(	2022.11.22	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 도로시설과(신청사 3층, 태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1655	/전송	2133-1078	/	jinhwanpark@seoul.go.kr	/	부분공개(5)