아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	잠수교 차 없는 다리 정례운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역 변경계약 의뢰

1. 보행자전거과-4473(2022.11.21)호와 관련입니다.

2. 우리부서의 "잠수교 차 없는 다리 정례운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역"과 관련하여 아래와 같이 변경계약(감액)하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약개요

- 용 역 명 : 잠수교 차 없는 다리 정례운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역

- 계약기간 : '22.9.25 ~12.23

- 용 역 사 : 주식회사 케이제이에스랩(대표자 나봉채)

- 계약금액 : 금121,124,780원(금일억이천일백일십이만사천칠백팔십원)

나. 변경내용

- 계약금액 변경

(단위 : 원)

구분	변경내용		비고(감액)
	당초	변경
계약 금액	121,124,780	***********	**********

- 감액사유

· 당초 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리를 위해 '22.9.25(일)~10.30(일)까지 매주 일요일 총 6회 기준으로 계약을 체결했으나,

· 축제 주관 한강사업본부에서 10.30(일) 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제를  취소함에 따라 교통통제 1회 미실시로 인한 계약 금액 변경 사유가 발생함

- 귀책사유 : 서울시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 산출변경내역서 1부.  끝.

	보행자전거과장
주무관	박성훈		보행자전거정책팀장	최미숙		보행자전거과장	11/23
오세우
협조자
시행	보행자전거과-4634	(	2022.11.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 6층 보행자전거과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2416	/전송	02-2133-1057	/	freetour98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)