문서번호	방재시설부-30581
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		최진우	11/23
			이동훈
협조

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -

설계변경(총차 2회, 2차 1회) 검토 보고

2022.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -

설계변경(총차 2회, 2차 1회) 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사 1공구 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 설계변경(총차2회, 2차1회)에 대하여 검토 보고드림.

※ 관련문서: 이산2022-6136호(2022.11.21.)

1		용역개요

❍ 위    치: 양천구 화곡고가사거리~신정동1060(국회대로)

❍ 사업규모: 지하차도 신설 L=1.09km, 진출입시설 각 1개소

❍ 용역기간: 2020.12.01. ~ 2025.11.30.(2차: 2022.1.1. ~ `2022.12.31.)

❍ 용 역 비: 5,864백만원(2차: 985백만원)

❍ 용 역 사: (주)이산 외 3개사(대표: 이원찬)

2		검토내용

❍ 설계변경 사유

- 총차(2회): 물가변동(2회)에 따른 계약금액 조정 반영

-  2차(1회) : 물가변동(2회)에 따른 계약금액 조정 반영 및 건설사업 관리기술인 투입계획 변경에 따른 용역기간 변경

❍ 설계변경 현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총차	용역금액	5,864,490천원	6,038,500천원	증 174,010천원
	용역기간	'20.12.01.~'25.11.30.	'20.12.01.~'25.11.30.	변경 없음
2차	용역금액	985,000천원	985,000천원	변경 없음
	용역기간	'22.01.01.~'22.12.31.	'22.01.01.~'23.01.20.	증 20일

❍ 2차분 건설사업관리기술자 투입계획 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
특급기술자(책임)	11.73개월	12.41개월	증 0.68개월
고급기술자(토목)	11.73개월	12.41개월	증 0.68개월
중급기술자(안전)	11.73개월	12.41개월	증 0.68개월
중급기술자(토목)	11.73개월	11.32개월	감 0.41개월
초급기술자(토목)	5.68개월	-	감 5.68개월
기술지원기술자	11.73개월	12.41개월	증 0.68개월

3		검토의견

❍ 물가변동(2회)에 의한 계약금액 조정 및 건설사업관리기술자 투입계획 변경사항을 반영한 설계변경으로,

❍ 총차 계약금액 변경 및 2차 용역기간 변경함이 적정하므로 검토한 바와 같이 설계변경하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  변경설계서 제출 1부.  끝.