문서번호	수변감성도시과-4291
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장		물순환안전국장
나영탁	강승곤	박홍봉		11/23
				한유석
협 조

「2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」 준공기한 연기 보고

「2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」 준공기한 연기 보고

2022.  11.

물순환안전국

(수변감성도시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」 준공기한 연기 보고

「2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」의 내실있는 성과를 도출하기 위해 준공기한을 연기하여 추진하고자 함

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역

ㅇ 용역기간 : 2022. 5. 23. ~ 11. 30.

ㅇ 용역업체 : (주)지오그린21

ㅇ 계약금액 : 249,200천원

ㅇ 주요 과업내용

- 강북·도봉·노원구 관내 보조측정망 현황 조사·분석, 부적합 측정지점 재배치

- 지하수 전용측정시설 신설 지점 선정 및 부지확보, 착정 및 보호시설물 설치

- 2021년 지하수 관측연보 발간 및 지하수 이상변동 지점 조사, 원인규명 등

□ 추진경과

ㅇ 2022. 05. 20. : 계약체결

ㅇ 2022. 08. 09. : 착수보고

ㅇ 2022. 10. 06. : 중간보고 및 자문회의

ㅇ 2022. 11. 21. : 과업기간 변경 신청 접수

□ 과업변경

ㅇ 변경사항 : 준공기한 연기에 따른 계약기간 연장

변경사항	당 초	변 경	비 고
준공기한	2022. 11. 30.	2022. 12. 23.	용역기간 23일 연장

ㅇ 변경사유

***********************************************************************************

********************************************************************

ㅇ 연기사유 귀책소재 : 없음

ㅇ 지체상금 부과여부 : 해당없음

□ 행정사항

ㅇ 준공기한 연기를 위한 계약변경 의뢰(재무과)

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 과업 변경 신청서 1부.

3. 합의각서(안) 1부.

4. 예정공정표 1부.  끝.