문서번호	보행자전거과-4696
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보행안전팀장	보행자전거과장
이다원		최미선	11/24
			오세우
협 조

2022년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사  실시설계용역 변경계약 계획

2022. 11.

도시교통실

(보행자전거과)

2022년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역 변경계약

2022년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역에 대해 추가비용이 발생함에 따라 변경계약 체결하고자 함

Ⅰ		용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 2022년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역

ㅇ *********************************************

ㅇ ***********************************

ㅇ *********************

ㅇ *********************************

Ⅱ		변경 내용

ㅇ 용역금액 변경 : **************

(단위 : 원)

**	****		**
	**	**
*****	**********	**********	*********
*******	*******	*******	******
********	**********	**********	*********
*****	*********	*********	*******
*	**********	**********	**********

ㅇ 변경사유

－ 도로교통법 제27조 제7항('22.7.12. 시행)에 의거 서울경찰청 비신호 횡단보도 점멸신호기 등교체(황색→적색) 요청으로 추가 과업 지시에 따른 용역 금액 증가

※ 어린이보호구역 비신호횡단보도 교통안전시설 개선 통보(서울경찰청 교통관리과-15607호)

	<도로교통법 제27조 제7항>(신설 2022. 1. 11.)
모든 차 또는 노면전차의 운전자는 제12조 제1항에 따른 어린이 보호구역 내에 설치된 횡단보도 중 신호기가 설치되지 아니한 횡단보도 앞(정지선이 설치된 경우에는 그 정지선을 말한다)에서는 보행자의 횡단 여부와 관계없이 일시정지하여야 한다.

ㅇ 예산과목 : 보행자전거과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자이동편의 증진, 어린이안전영상정보인프라, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		향후 계획

ㅇ 변경계약 의뢰(→재무과) : '22. 11월

ㅇ 용역 준공               : '22. 12월

붙임  1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 변경계약내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.  끝.