아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역)

1. 수변감성도시과-4291(2022. 11. 23.)호와 관련입니다.

2. 「2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」에 대해 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2022년 지하수 보조관측망 관리개선 용역

나. 계약금액 : 249,200,000원

다. 계약업체 : (주)지오그린21

라. 변경내용 : 준공기한 연기에 따른 계약기간 연장

변경내용	당초	변경	비고
계약기간	2022. 5. 23.~2022. 11. 30.	2022. 5. 23.~2022. 12. 23.	23일 연장

마. 연기사유 : 준공기한 연기의뢰서 참조

바. 지체상금 : 미부과

붙임  1. 방침서 1부. 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	수변감성도시과장
주무관	나영탁		토양지하수팀장	강승곤		수변감성도시과장	11/24
박홍봉
협조자
시행	수변감성도시과-4340	(	2022.11.24	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, (서소문동) 서소문청사 1동	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	nyt4466@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)