문서번호	시설과-1400
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
김경원		이종무	11/24
			이정환
협조
	재무팀장		김연호

- 2022년 사방시설 유지관리공사(단가계약) -

설계변경(최종) 검토보고

2022. 11.

중부공원여가센터

(시  설  과)

- 2022년 사방시설 유지관리공사(단가계약) -

설계변경(최종) 검토보고

「2022년 사방시설 유지관리공사(단가계약)」과 관련하여 현장 여건에 따른 시공물량 변동, 보험료 정산 등을 반영한 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 22조 및 동법 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2022년 사방시설 유지관리공사(단가계약)

❍ 위    치 : 남산공원 및 산하공원 사방시설

❍ 공사내용

- 사방시설물 정비: 침사지 준설 30㎡, 스틸그레이팅 정비 10㎡

- 도복목 제거: 관목 전정 160㎡ 및 현장 내 수목제거 29주

- 사방시설 설치: 식생토낭 쌓기 140m 등

❍ 공사기간 : ’22. 3. 7. ~ 11. 30.

❍ 공 사 비 : *****************

❍ 도급업체 : ***************

□ 추진경위

❍ 2022. 02. 10. : 추진계획 수립

❍ 2022. 02. 21. : 공사 발주

❍ 2022. 03. 07. : 공사 계약 및 착공

❍ 2022. 03. ~ 10. : 작업지시(1~3차) 시행 및 완료

□ 설계변경 보고내용

❍ 설계변경 사유

***************************************

❍ 주요 물량 변경사항

공 종	규 격	단위	수량			비고
			당초	변경	증 · 감
********	****	*	**	**	*****
******	****	*	**	*	*****
*********	****	*	*	**	*****
*******	****	*	*	*	******

❍ 경비(보험료 등) 정산 내역                               (단위 : 원)

구 분	금 액			비고
	당초	변경	증 · 감
*****	*******	*	***********	***
*****	*******	*	***********	*
*********	*******	*	***********	*
*****	*******	*	***********	*

❍ 공사비 변경내역                                        (단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비고
		당 초	변 경	증 · 감
*******		**********	**********	***************
* * *	****	**********	**********	***************
	*****	*********	*********	***************
	********	**********	**********	***************

□ 검토의견

❍ 본 공사의 현장여건 등을 적절하게 반영한 사항으로 조속히 설계변경(정산)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부

2. 제비율 검증확인서 1부.   끝.