문서번호	기전과-29274
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	11/28
			최연우
협 조

「증산지하차도 외 4개소 집수정 준설공사」

추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  11.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「증산지하차도 외 4개소 집수정 준설공사」

추진계획

게릴라성 집중 호우 빈번 등으로 침수 대응체계 강화를 위해 배수시설에 대한 정비 필요성 대두 및 집수정 내 초음파 수위계 신규설치 및 초기설정을 위해 집수정 준설공사를 시행하고자 함.

1		현황 및 실태

집수정 현황(강제배수 지하차도 집수정)

시 설 명 (강제배수)	지하차도 규모		집수정 규모 [㎥ = H(m)×B(m)×L(m)]	유입 관경 [mm]
	연장/박스[m]	폭[m]
퇴계로	250 / 70	15	182 = 3.5 × 4 × 13	300 × 1개
서빙고	340 / 127	12	140 = 4 × 3.5 × 10	200 × 1개
증산	575 / 221	27.5	440 = 2.4 × 7.4 × 25	400 × 6개
성산	377 / 110	10.5	129 = 3 × 4 × 10.8	400 × 3개
모래내	325 / 146	9.7	525 = 3.5 × 15 × 10	150 × 6개

※ 자연배수 지하차도(6) : 연희, 잠수교북단, 의주로, 이태원, 남산2호입구, 신사

실    태

□ 집중 호우 등으로 인한 지하차도 침수 발생

- 기후변화로 게릴라성 호우가 빈번하면서 차도 내 토사·이물질 유입등으로 배수구 막힘, 집수정 퇴적 등 발생

□ 침수 예방을 위한 집수정 내 초음파 수위계 신규설치 및 초기설정 필요

- 집수정 내 준설토 및 이물질이 제거된 상태에서 초기설정 필요

※ '초음파 수위계 신규설치' 포함 배수펌프 제어시스템 이중화 사업 시행 중

: '22. 10. 17. ~ 12. 16.

2		개선 방안

□ 그간 집수정 내부에 퇴적된 흙·모래 및 유입 이물질 등을 제거하고, 초음파 수위계 설치 및 초기 설정작업 환경을 조성하기 위하여 집수정 준설 실시

3		추진 경위

□ 사업 방침 수립 :「기전과-28911(2022.11.17.)」

□ 예산 재배정 요청 :「기전과-28914(2022.11.17.)」

□ 예산 재배정 : 2022. 11. 28.

4		세부 추진 계획

□ 사 업 명 : 2022년 증산지하차도 외 4개소 집수정 준설공사

□ 위    치 : 강제배수 지하차도 5개소(퇴계로, 서빙고, 증산, 성산, 모래내)

□ 사업목적 : 집수정 퇴적물·부유물 제거하여 원활한 배수환경 및 초음파 수위계 설치 초기환경 조성

□ 사업기간 : 2022. 11. ~ 12.

□ 사 업 비 : ********

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 지하차도 노후 배수시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 사업규모 : 집수정 준설작업 1식

- 집수정 퇴적물(흙, 모래, 슬러지 등) 제거 및 세척

· 준설차량 흡입 및 고압살수 사용

□ 계약방법 : 수의계약(1인 견적)

- 관련법령 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호 가목(여성기업)

- 자격조건 : 상·하수도설비공사 면허 소지자

□ 계약업체 : *******************

- 선정사유 : 준설작업에 필요한 장비 및 인력을 충분히 갖췄으며, 작업 현장 위치 및 구조물에 대한 이해도가 우수하여 단기간 신속한 작업이 가능하기에 선정함.

5		사전 심의 절차

□ 특정제품 선정심사 : 해당없음

- 동일 특정제품의 재료원가 합계금액이 5천만원 미만 제외

□ 계약심사 : 해당없음

- 추정금액 5억원 미만의 일반공사 제외

□ 일상감사 : 해당없음

- 추정가격 10억원 미만 전문공사 제외

□ 사전규격 공개 : 해당없음

- 추정가격 5천만원 이상 물품 및 용역 입찰계약에 해당 안됨.

6		향후 계획

□ '22. 11. 28. : 계약 의뢰 (→ 관리단속과)

- 준공기한 : 착공일로부터 29일 간

□ '22. 12월 중 : 사업 준공.  끝.