문서번호	급수운영과-34304
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
신중선	이승우	최춘근		11/28
				박기용
협 조
	주무관		최순영

공사 설계변경 시행 보고

(2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

2022. 11

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

공사 설계변경 시행 보고

「2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사」시행 중 압입 구간 추가 발생 등 현장 실정을 반영하여 설계변경 시행코자 함.

□ 관련근거

ㅇ 지방계약법 제22조 및 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장(행안부 예규)

ㅇ 설계변경(1회) 검토보고서 제출(서울시설공단 공사감독2처-12904, '22.11.3.)

ㅇ 계약심사 결과 알림(본청 계약심사과-32176, '22.11.23.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사기간 : 2022. 6. 28 ~ 2023. 1. 23

ㅇ 공사규모 : D=150~800㎜, L=1,260m

ㅇ 도 급 비 : ***************************

ㅇ 감 독 처 : 서울시설공단 공사감독2처

□ 추진경위

ㅇ (’22.04.27) 공사 시행 방침 수립

ㅇ (’22.04.29) 공사 계약 의뢰

ㅇ (’22.06.28) 공사 계약 및 착공

ㅇ (’22.11.03) 설계변경(1회) 검토보고서 제출(서울시설공단 → 사업소)

ㅇ (’22.11.15) 공사계약(설계변경) 심사요청(사업소 → 본청 계약심사과)

ㅇ (’22.11.23) 계약심사 결과 알림(본청 계약심사과 → 사업소)

□ 설계변경 시행

ㅇ 변경사유 : 현장 상태 상이 및 발주처 계획 변경에 따른 부설연장 조정

연번	구 분	주요 변경내용	관 련 근 거
1	1차 실정보고	************************************* ***************** ***************	급수운영과-28737 (2022.08.24.)
2	2차 실정보고	****************************************	급수운영과-28963 (2022.08.30.)
3	3차 실정보고	***************** *************	급수운영과-30907 (2022.09.30.)
4	4차 실정보고	******* ********************	급수운영과-30357 (2022.09.22.)
5	발 주 처 계획변경	********************************* ************************* ***************************	본부 배수과-21773 (2022.05.30.)

ㅇ 주요 공종 변경 내용

공 종	규 격	단위	수 량			증감액 (천원)
			당 초	변 경	증·감
********	************	*	***	*****	*******	*****
*********	*********	*	*	*	*****	******
************	**************	**	*	*	*****	*******
******	*************	*	*****	*****	*******	********

ㅇ 설계변경에 따른 계약금액 조정

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
***	********	*************	*************	***************
	*******	*************	*************	***************
	*****	***********	***********	*************

※ 본청 계약심사과 계약심사 결과(계약심사과-32176, '22.11.23.) 반영.

□ 행정사항

ㅇ 변경계약 의뢰 (급수운영과 → 행정지원과)

ㅇ 변경내역

공 사 명	계 약 자	계약기간	도 급 비 (원)		비 고
			변경전	변경후
2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사	***** ******	***********************	*************	*************

붙 임  1. 계약심사 결과(주요 심사내용 및 내역서 포함) 1부.

2. 설계변경(1회) 검토보고서(서울시설공단) 1부.

3. 실정보고서 및 승인문서 1부.  끝.