문서번호	도시철도토목부-30118
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정2부시장 제266호

						시 민
궤도과장	도시철도토목부장		도시철도국장		도시기반시설본부장		행정2부시장
허동	류용열		하종현		김성보		11/28
							한제현
협 조
	예산담당관					강석
	총무부장					신현준
	주무관					조태현

『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』

소송결과(1심)에 따른 예비비 지출계획 보고

2022. 11.

서울특별시 도시기반시설본부

【도시철도토목부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』

소송결과(1심)에 따른 예비비 지출계획 보고

「지하철9호선 3단계 919공구 건설공사」와 관련, 공사대금 청구 소송 결과(1심)에 따른 예비비 지출계획을 보고드림.

1		공사 현황

○ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

○ 공사개요: 총연장 L=1,560m(정거장 2개소)

○ 공사금액: **********

○ 공사기간: 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

○ 도 급 사: 삼성물산(주) 외 2개사

○ 위 치 도

2		소송 개요

○ 사건번호: 서울중앙지방법원 2019가합585747(공사대금 청구의 소)

○ 원    고: 삼성물산(주) 외 1명(소송대리인 : 법무법인(유한) 태평양)

○ 피    고: 서울특별시(소송대리인 : 법무법인(유한) 지평)

○ 소    가: *********************************************

		<사건 개요>
▹『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』총괄계약 36개월(당초 '19.12.31.~ '15.12.29. 변경 '19.12.31.~'18.12.31.) 공기연장에 따른 간접비, 공사중 발생한 추가공사비와 감액된 공사비에 대하여 원고측 귀책사유가 없다며 공사대금 지급 요청

3		추진 경위

○ '19. 11. 19.: 소장접수

○ '20. 05. 14.: 1차 변론기일

○ '22. 09. 08.: 청구취지 및 청구원인 변경신청

※ 변경내용: 감정서에서 도출 된 금액으로 청구금액 변경

**********************************

*****************************************************

○ '22. 09. 29.: 4차 변론기일

○ '22. 11. 10.: **********************

4		판결 결과

□ *********************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************

5		판결금 지급 현황

○ 1심 판결에 따른 판결금 가지급금은 예비비 사용하여 최대한 신속히 지급

- 지급예정일: '22. 11. 30.(수)

- 지급 급액: *************************************************

(산정기준일: '22. 11. 30., 단위: 원)

구 분		**** *****************	**** *****************	***** *******************
1심	원 금	***********	**********	***********
	이 자(6%) (`19.8.8. ~ `22.11.10.)	**********	**********	**********
	이 자(12%) (`22.11.11.~`22.11.30.)	*******	*******	*********
	원 금	***********	***********	*************
	이 자(6%) (`19.8.29.~`22.11.10.)	***********	**********	***********
	이 자(12%) (`22.11.11.~`22.11.30.)	*********	*********	*********
	계(A)	***********	***********	*************

※ 실제 지출금액은 지급일자에 따라 변경될 수 있음.

재원 부담: 본청 예비비 예산에서 지급

6		예비비 사용계획

○ 지급시기: 2022.11.30.(수)(이자계산일: 2022.11.30. 기준)

○ 지급사유: 항소기각 가능성도 적지 않고, 항소심 소송비용 부담을 고려할 때 부대항소로 대응하고자 하며, 우선 1심 판결금액에 대한 금융비용(연 12%)을 감안하여 판결금 지급

**********************

**************************************

(단위 : 원)

구 분	계	판 결 금	이 자 (연6%)	이 자 (연 12%)	비 고
			`19.8.8. ~ `22.11.10.	`22.11.11. ~ `22.11.30.
지급비용	*************	*************	***********	*********	************ **********

○ 지급방법: 원고 신청 계좌에 이체

○ 예비비 사용근거

- 지방재정법 제43조(예비비)

- 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제12조(예비비의 사용)

○ 예비비 요구액:************

- ***********************************

7		예산변경 내역(예비비 사용승인 후)

○ 일반예비비(예산담당관) → 시설비(도시철도토목부): ************

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산현액	승인 요청액		승인 후 잔 액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
일반예산 (예비비)	예비비 (기획조정실 예산담당관)	예비비	예비비 (801)	일반예비비(01)	**********	*	**********	**********
도시 기반 시설 관리	도시기반 시설관리	9호선 3단계 919공구 건설	배상금 등	배상금 등	*	*********	*	*********

8		조치 계획

○ 1심 판결에 따른 판결금 가지급금은 원고로부터 청구서를 제출받아 일반회계 예비비를 확보하여 최대한 신속히 지급

9		행정 사항

○ 예비비 사용승인 및 예산배정: 예산담당관, 도시기반시설본부 재무과

○ 판결금 지급요청 및 지출: 도시기반시설본부 도시철도토목부, 재무과

붙 임  1) 방침서(공사대금 청구 소송 결과 및 조치계획) 1부.

2) 판결문 1부.

3) 소송대리인 의견서 1부.

4) 산출근거(대법원 전자소송-손해배상 등 계산프로그램) 1부.  끝.