문서번호	도시철도건축부-26398
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
김영준		박영동	11/28
			임우진
협조
	주무관		채종철

「별내선(8호선연장)1공구 건설공사」

미술작품 제작·설치비 내역반영 실정보고

2022.11.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

미술작품 제작·설치비 내역반영 실정보고

별내선(8호선연장) 1공구 정거장 미술작품 제작·설치비 관련 도급내역 반영에 대한 실정보고임.

□ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 [행정안전부]

(제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사 설계의 변경)

○ 미술작품 제작 및 설치비 내역반영에 따른 실정보고 승인 요청

[건설사업관리단, 별내 감1-22-1032(2022.11.24.)호]

□ 실정보고 내용

○ *********************************** *********************

□ 실정보고 내용 검토 등

○ 관련법규 등 검토

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사설계의 변경

2. 설계서의 정정·보완

2) 설계서에 누락·오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사 확인하고 계약목적물의       기능과 안전을 확보할 수 있도록 설계서를 보완한다.

- 공사시방서(별내선 1공구)

· A180800 미술작품설치공사

2.1 설치방법

(2) 작품제작·설치비 : ***************************                       *************************

○ 건설사업관리단 검토

- *********************************** ***

- ***************************************************************

○ 종합검토결과

- ********************************* ********************************** ******************

****************************************************                    ************

- ********************************

***********************

- 금액변경

구분	공사비			비고
	당초	변경	증감
******	*	*	*
*********	*	*********	***********
****	*	*********	***********
****	*********	*********	*

□ 향후계획

○ '22. 11. 실정보고 승인처리 (도철건축부→건설사업관리단)

○ '23. 01. 별내선1공구 건설공사 6차 계약내역에 반영

붙 임  미술작품 내역반영에 따른 실정보고 승인 요청 1부.  끝.