실정보고(조경) 검토결과(제2자유로 종점부 입체화 공사 )

공사명

제2자유로 종점부 입체화 공사

공사개요

◦위치: 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리 일대

◦규모: 지하차도 신설(폭4차로, 연장 540m),

월드컵로 확장

- 조경: 가로수, 띠녹지, 지하차도 상부 식재 등

◦공사기간:‘19.8.1~‘22.12.31

◦도 급 비: 56,069백만원

- 조경: 620백만원

◦시공사 : 삼부토건(주)외 2

◦감리단 : 동부엔지니어링(주)외2

◦설계사 : ㈜유신 외 3

보고 건명

조경복구계획 변경 실정 보고

보고 배경

◦조경복구계획(안) 변경 수립 및 설계변경 사항 보고 요청

- '22년 제5차 도시숲등의 조성․관리 심의 결과 및 관리청(서부공원여가센터, 마포구) 의견에 대한 기술 검토 후 결과 보고

※ 근거 : 방재시설부-22814호(2022.05.24.), 29322호(2022.10.27.)

보고요지

◦도시숲 등의 조성․관리 심의 결과 및 관리청 의견에 따른 조경복구계획(안) 변경 반영,

현장 여건에 따른 물량 변경 등

건설사업

관리단

검토의견

◦관계 심의 및 관리청 의견을 반영하여 조경 복구 계획 수립하고 현장 여건상

누락분 등 반영한 것으로 계획 타당하며 공사비 산정 등 적정함.

변경내용

조경복구계획

변경

[수종변경]

◦변경 내역

(교목) 잣나무 등 4종 → 소나무 등 13종

(관목) 황금사철, 흰말채나무 등 12종 → 조팝나무, 화살나무 등 11종

◦변경사유: 조경복구 계획 변경에 따른 수종 변경

(띠녹지 관목 저관리형 수종으로 변경 등)

[물량 및 공종변경]

◦변경 내역

구 분	규격	단위	당 초	변 경	증·감(△)	비 고
교 목 류	-	주	205	308	103
관 목 류	-	주	17,610	22,250	4,640
지 피 류	-	본	-	74,537	74,537
식물매트	340*500*T40	㎡	-	978	978	맥문동매트
잔 디	-	㎡	1,677	-	△1,677
멀 칭 재	-	㎡		121	121	우드칩
수목보호틀	-	m		76	76
통기관	D100*1m	m		266	266
암석원 복구	목본류	주		35	35
	초본류	본		549	549
	부대공	식		1	1	경관석놓기, 멀칭석깔기, QC밸브 등

◦변경 사유: 조경복구계획 변경 및 공원지역 복구, 교통섬 녹지 등 누락분 물량 반영

현장여건반영

◦변경 내역

구 분	단위	당 초	변 경	증·감(△)	비 고
관 목 류	주	640	0	△640	철쭉, 회양목
조경유용석 놓기	톤	2,496	-	△2,496

◦변경 사유: 월드컵로 선형 변경되어 조경석 이설 불필요함에 따라 사이목 식재 삭제

유지관리공

물량 조정

◦변경 내역

구 분	단위	당 초	변 경	증·감(△)	비 고
병해충 방제 (교목, 관목 100%)	회	6	4	△2	준공후 2년

◦변경 사유: LH기준 준용하여 연2회 기준으로 방제 횟수 적정 변경

사업비

변경

◦변경내용: *********************************

[단위: 천원]

구 분	당 초	변 경	증·감(△)	비고
*****	*******	*******	*******
*****	*******	*******	*******
*****	*******	*******	*******

- 기존비목 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 협의율(89.077%) 적용

- 감리의견 : 적정함.

사업비

****************되나 수용 가능(주무부서 실무협의 완료 등)

행정절차

설계변경 소위원회(조경) 심의 이행 필요

공기영향

영향 없음

처리의견

◦ 도시숲 심의결과 지적사항 이행 및 유관기관 협의의견 반영하여 조경복구계획안 적절하게 변경하였고, 기존 설계 시 누락된 공원 복구지역(암석원 등) 등 추가 반영한 것으로 변경에 따른 사유 및 내용, 규모가 적정한 것으로 판단됨.

◦ 추후 설계변경소위원회 심의 절차 이행을 조건으로 승인하고자 함.

비 고

따로 붙임 : 실정보고서(제2자유입건 제2022-394호(2022.11.14.))

결재

주무관

이은국

조경시설과장

오성훈

방재시설부장

11/14

이동훈