문서번호	토목부-35165
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		한병찬	11/29
			하현석
협조
	주무관		도제경

예비준공검사 시행계획 보고

[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사]

2022. 11.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

예비준공검사 시행계획 보고

본 공사 '22.12. 준공에 따른 유지관리부서와 합동으로 예비 준공검사를 실시하여 향후 시설물 사무관리 위임에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

○ 건설기술진흥법 시행령 제60조의2(발주청의 업무범위)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

○ 건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선[기술심사담당관-10083(2018.06.28.)]

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례[[조례 제8448호, 2022.08.08.]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사규모 : 램프 신설 및 이설 L=2.9km

- 신설 L=1,600m(교량 446m 포함) /이설 L=1,309m(교량 139m 포함)

○ 공사기간 : '16.4.1. ~ '22.12.31. (7차 '22.5.10.~12.31.)

○ 공 사 비 : 43,294백만원 (7차 9,172백만원)

○ 시공사/건설사업단 : ㈜덕일 외 2개사 / ㈜이산 외 2개사

○ 시공 현황(11.29. 기준) : 공정률 93.6%

****

Ⅲ		예비준공검사 및 합동점검 개요

○ 일시 : '22.12.01.(목)~12.16.(금) (※공사 완료 일정에 맞춰 기관별 합동점검 시행)

○ 대상 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 전구간

○ 검사 및 입회자

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 도로시설과(서울시설공단), 동부도로사업소, 한강사업본부, 송파구, 송파경찰서

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 주요 점검사항

- 시설물 사무관리위임 기관 및 시설물 현황 확정

※ 시설물 관리기관 이견시 주관부서(도로계획과)에서 결정

- 시설물 시공현황, 추가 보완사항 등

- 준공대비 미비사항 파악

Ⅳ		향 후 계 획

○ 2022.12.16. : 시설물 관리기관 확정 및 예비준공검사 지적사항 제출(별첨)

(시설물 관리기관 → 도기본)

○ 2022.12.21. : 지적사항 조치 및 조치결과 제출

(도기본 → 시설물 관리기관)

○ 2022.12.30. : 시설물 사무관리위임 및 준공

○ 2023.01.31. : 준공도서 이관

붙임  1. 건설사업관리단 제출 공문 1부.

2. 예비준공검사 지적사항 제출양식 1부.  끝.