아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 [2022년 쌍문1아리수올림터 등 5개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역]

우리 사업소에서 시행중인 『2022년 쌍문1아리수올림터 등 5개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역』건에 대해 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 2022년 쌍문1아리수올림터 등 5개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역

2. 계약업체 : (주)한국시설안전연구원 엄경득

3. 계약기간 : 2022. 2. 15. ~ 11. 30(계약일 2.10.)

4. 변경내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감액	비 고
공급가액	50,546,364	67,540,000
부 가 세	5,054,636	6,754,000
총용역비	55,601,000	74,294,000	증) 18,693,000

5. 설계변경 사유 : 신규공종 발생

6. 예산과목 :

-  상수도사업본부,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

(배수지등정밀안전진단점검 및 시설정비-22202)

붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부.   .

주무관	박상권		주무관	김명석		급수운영과장	代이문성		북부수도사업소장	11/29
권태규
협조자	주무관	진하영		급수관리팀장	代박상권		주무관	구명임
시행	급수운영과-35581	(	2022.11.29	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)