문서번호	치수과-25002
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
김태규	최연호	11/29
		代최연호

- 염창나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토보고

2022. 11.

한강사업본부

(치  수  과)

- 염창나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토보고

『염창나들목 리모델링 공사』관련 서울시설공단 실정보고 사항  (기초파일 변경)에 대한 검토 및 처리계획을 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 염창나들목 리모델링 공사

ㅇ 공사기간 : 2021.09.08 ~ 2023.06.30. (1차 : ’21.09.08 ~ ’22.12.31)

ㅇ 공사규모 : 차수벽 철거, 육갑문 및 E/V설치, 나들목 내·외부 환경개선

***************************************

**********************

ㅇ 공사감독대행 : 서울시설공단 공사감독 1처

□ 보고내용

ㅇ 관련근거

- 공사감독1처-6768(2022.11.24.)호『실정보고 검토보고(기초공법 변경)』

- 염창 2022-21(2022.11.15.)호『기초파일 변경 실정보고』

ㅇ 기초파일 공법 변경 사유

- 육갑문 및 승강기 기초공법은 PHC말뚝(D=400mm)으로 설계되어 천공장비 조립 및 해체시 최소 20×30m 작업공간 필요하나 현장 여건상 작업공간이 협소함

- 작업공간 확보를 위해서는 제외지 자전거도로, 제내지 보행로를 전면 통제하여야 하며, 민원 및 안전사고 발생 우려가 있어 협소한 현장 상황에 적합한 마이크로 파일로 변경 시공 필요

ㅇ PHC말뚝 시공시 예상 점용 현황

제외지 PHC 말뚝 시공시

제내지 PHC 말뚝 시공시

ㅇ 말뚝 기초파일 변경

육갑문 기초 당초	육갑문 기초 변경

승강기 기초 당초	승강기 기초 변경

ㅇ 주요공종 수량 증·감 현황

공 종		규격	단위	당초	변경	증·감	비고
* * * **	*********	************************	*	***	*	****
	*********		*	***	*	****
	**********		**	**	*	***
	******	******	*	*	*	**
		*******	*	*	*	**
	*****	*******	*	*	*	**
		********	*	*	*	**
	*****		*	*	*	**
******	*********		*	*	*	**
	**********	************	*	*	***	****
	****	************	*	*	***	****
	****	************	*	*	**	***
	**********	**********************	*	*	**	***
		**********************	*	*	*	**
	****		*	*	***	****
	******		*	*	**	***
	******		*	*	*	**
	****	****	**	*	*	**

ㅇ 개략공사비 증·감 현황

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
***	**********	**********	***********
****	**********	**********	***********
***	*********	*********	**********

□ 검토내용

<서울시설공단>

ㅇ PHC말뚝으로 시공시 제외지 가도구간의 최대경사 16% 구간의 중장비 및 자재 진출입시 위험 요인이 있으며, 자전거도로 및 보행로 전면차단으로 우회로 확보가 어려움

ㅇ 제내지 측으로는 장비 반입 동선확보 자체가 어려우며 시공시 소음 및 분진으로 인근 아파트 민원 발생 예상됨

ㅇ 원설계 구조검토서의 육갑문 및 승강기 기초 작용하중에 대하여 마이크로파일 공법 변경 시공에 따른 구조 검토결과 지지력 및 침하량 이상없음

- 토질 및 기초기술사의 지지력 및 침하량 검토보고서 첨부

ㅇ 현장 여건을 반영하여 시공시 진동과 소음이 작고, 소규모 현장에 효율적으로 적용가능한 마이크로파일 공법으로 변경하는 것이 타당함

<설계사 의견>

ㅇ 당초 상부 가도와 하부 자전거도로를 이용하여 말뚝 시공장비를 운영하는 것으로 계획하였으며, 현장여건 및 시공성을 고려하여 필요시 변경가능

ㅇ 수직력이 지배적인 육갑문 및 승강기 구조물로 현장여건 및 시공성을 고려하여 마이크로파일로의 변경은 문제 없을 것으로 판단되며, 공법 적용시 지지력 및 본체의 안전성 검토 후 시공 필요

<보고자 의견>

ㅇ 안전한 현장관리와 민원발생 최소화를 위하여 상기 검토된 바와 같이 기초 파일 형식을 변경하여 시공함이 타당하다고 사료됨

ㅇ 신규대가(마이크로파일)에 대한 단가는 설계변경 시 시공사와 협의하여 협의단가 적용

□ 조치계획

ㅇ 상기 검토내용과 같이 실정보고 사항 승인 통보(치수과→서울시설공단)

ㅇ 공사 시행중 안전관리 철저 및 추후 설계변경 시 반영

붙임 : 1. 서울시설공단 검토보고서 1부.

2. 마이크로파일 구조계산서 1부.

3. 설계사 검토의견 1부.  끝.