문서번호	시설과-27821
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장
송용현	문석기	11/29
		이이동
협 조
	총무과장		김중태
	전략기획실장		구재성
	주무관		천미영

서울랜드 노후 송수관로 교체공사  설계변경 및 낙찰차액 사용 보고

2022. 11.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울랜드 노후 송수관로 교체공사

설계변경 및 낙찰차액 사용 보고

우리 대공원에서 시행중인‘서울랜드 노후 송수관로 교체공사’에 대하여 신규공종 추가 등 사유로 인하여 낙찰차액을 활용하여 설계변경을 시행하고자 함.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울랜드 노후 송수관로 교체공사

○ 위    치 : 과천시 대공원광장로 102번지(서울랜드 배수지 등)

○ 계약금액 : 312,216,580원

○ 공사기간 : 2022. 10. 13. ~ 2023. 2. 13.

○ 시 공 사 :***************

2		관련근거

○ 시공자 실정보고서 : 승민 제*******01호(2022. 11. 24.)

(서울랜드 노후 송수관로 교체공사 실정보고서 건)

3		변경 실정보고 사항

○ 부대공사 등

- 1구간(지하공동구) 배관 기존 기초 콘크리트 지지대 사용 설계 변경 건

4		공종별 증감내역

(단위 : 원)

연번	공 종	당 초	변 경	사 유	증·감	비고
1	부대공	14,891,945	35,582,200	변경	증	지하공동구 지지대
2	사급자재대	26,092,444	31,909,932	변경	증

5		공사비 증감

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감		비 고
도급비	공급가액	283,833,255	320,859,581	증	37,026,326
	부가가치세	28,383325	32,085,958	증	3,702,633
	계	312,216,580	352,945,540	증	40,728,960

6		예산확보 방안

○ 낙찰차액 88,410,610원을 활용 설계변경 필요예산 40,728,960원 확보

- 서울랜드 노후 송수관로 교체공사 낙찰차액 사용          (단위 : 원)

세부사업명	발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	비고
서울랜드 노후 송수관로 교체공사	401,150,000	312,216,580	88,410,610	사용)40,728,960

○ 예산과목 : 공원이용시민만족도 향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비및부대비, 시설비

7		조치의견

○ 공사일정을 감안하여, 상기 변경내용과 같이 설계변경을 시행하고    즉시 진행하고자 함.

8		행정사항

○ 위와 같이 『서울랜드 노후 송수관로 교체공사』의 제1회 실정보고 사항에 대하여 시공자에게 공사변경토록 통보하고, 설계변경 처리하고자 함.

붙임  1) 시공자 실정보고서(제1회) 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 검증확인서 1부.  끝.